문서번호	설비부-1816
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	02/17 박기형
협조
	경리과장		최영미

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사(1차)』

전기공사 및 관급자재 공사(납품)기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사(1차)』

전기공사 및 관급자재 공사(납품)기한 연기 검토 보고

『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』 선행공정인 토목공사의 공정지연으로 후속공정인 전기공사(1차) 및 관급자재(1차) 공사(납품)시기가 미도래하여 아래와 같이 연기하고자 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사

○ 규    모 : 수배전반 개량(염창2-4,000KVA×2대, 방화 – 2,500KVA×2대)

○ 공사기간 : 2013.03.13 ~ 2014.07.30.(1차 ‘13.03.13 ~ ’14.02.28)

○ 시공사 및 납품사 : ㈜투윈스컴, ㈜에너솔라, ㈜유성계전,(사)시민참여복지회

○ 감 리 사 : ㈜신화이에프원

관련근거

○ 신화 *******2호(2014.02.11.)호 전기공사(1차) 공사기간 및 관급자재 (1차) 납품기간 연기 실정보고.

보고내용

○ 공사기간 및 관급자재 연기사유

▸ 선행공정인 토모공사의 공정지연으로 후속공정인 전기공사 시공 및 관급자재의 납품시기 미도래.

○ 전기공사 현황 및 공사기한 연기 내용

구 분	계약금액(원)	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
총 차	392,170,740	2013.03.13.~2014.07.30	변경없음
1 차	100,000,000	2013.03.13.~2014.02.28	2013.03.13.~2014.07.30

○ 관급자재 현황 및 납품기한 연기 내용

▶ 염창2 빗물펌프장 수배전반

구분	계약번호	납품요구번호	납품금액(원)	당초납기일	변경납기일	비고(납품사)
총차	12132083100	12132096600	257,000,000	2014.06.30	변경없음	㈜에너솔라
1차	12132083100	12132096600	42,872,200	2014.02.28	2014.06.30

▶ 방화 빗물펌프장 수배전반

구분	계약번호	납품요구번호	납품금액(원)	당초납기일	변경납기일	비고(납품사)
총차	12132076600	12132084900	224,400,000	2014.06.30	변경없음	㈜유성계전
1차	12132076600	12132084900	149,094,000	2014.02.28	2014.06.30

▶ 염창2, 방화 빗물펌프장 계측제어장치

구분	계약번호	납품금액(원)	당초납기일	변경납기일	비고(납품사)
총차	2013073316700	99,500,000	2014.07.30	변경없음	(사)시민참여복지회
1차	2013073316700	36,268,480	2014.02.28	2014.07.30

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 공사 및 납품금액 : 변경없음

조치의견

○ 선행공정인 토목공사의 공정지연에 따라 후속공정인 전기공사(1차) 및 공사에 사용되는 관급자재(1차) 수배전반외 2종을 각 계약의 총차기간까지 연기하여 공사 및 자재 관리에 만전을 기하고자 하며, 건설총괄부에 납품기한 연기 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 관급자재 납품기한 연기 실정보고 1부. 끝.