투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(1차분) 납품기한 연기 요청(염창2 외 1개소 빗물펌프장 전기공사)

우리 본부에서 추진하고 있는 『염창2 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』의 관급자재 1차분에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기 요청합니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	금액(원)		계약업체	납품기한(1차)		비 고
		총차	1차		당 초	변 경
수배전반	12132096600	257,000,000	42,872,200	㈜에너솔라	`14.2.28	`14.6.30	122일
수배전반	12132084900	224,400,000	149,094,000	㈜유성계전	`14.2.28	`14.6.30	122일
계측제어장치	2013073316700	99,500,000	36,268,480	(사)시민참여복지회	‘14.2.28	‘14.7.30	152일

나. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 계약방법 : 조달구매(장기계속)

따로붙임 : 1. 관급자재 납품기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 동의서 및 계약서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	02/17 박기형
협조자
시행	설비부-1832	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개