문서번호	설비부-1813
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
박경철	이흥복	02/17 박기형

『중동빗물펌프장외 2개소 증설 기계공사』 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

도시기반시설본부

설비부

『중동빗물펌프장 외 2개소 증설 기계공사』

준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 『중동빗물펌프장 외 2개소 증설 기계공사』 추진관련, 준공기한(납품기한) 연기 신청에 대하여 검토하고 보고드림

1		관 련 근 거

❍ 시설공단 공사감독3처-1137(2014.02.13.) : 준공기한 연기 검토보고

❍ 시설공단 공사감독3처-1190(2014.02.14.) : 관급자재 납품기한 연기 검토보고

2		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 중동빗물펌프장 외 2개소 증설 기계설비공사

❍ 준공기한 : 2014.2.28(총차 : 2014.9.30.)

❍ 공사규모

- 중  동 : 펌프 260㎾ 2대 증설

- 합  정 : 펌프 270㎾ 4대 증설 및 교체

- 용두3 : 펌프 120㎾ 2대 신설

❍ 공사금액(1차) : 165,377,673원(총차 : 241,938,080원)

❍ 도 급 사 : (주)이엔디엔지니어링 대표 박영구

❍ 감 리 단 : 서울시시설관리공단

3		실정보고 내용

도급공사 준공기한 연기관련 검토내용

❍ 준공기한 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013.5.1.~2014.9.30	2013.5.1.~2014.9.30	변경없음
1 차	2013.5.1.~2014.2.28	2013.5.1.~2014.9.30	214일 연기

※ 공사금액 변경 없음

❍ 연기사유

- 선행공종(토목,건축)지연에 따른 도급(기계)공사 준공기한(1차) 연기

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

관급자재 납품기한 연기관련 검토내용

❍ 납품기한 변경내용

품명	납품요구번호	계약업체	계약금액 (원)	납품기한		비고
				당 초	변 경
버터플라이밸브	12-13-1-14027-00	㈜현대밸브	30,759,990	2014.2.28	2014.9.30	214일 연기
체크밸브	12-13-1-14028-00	〃	39,712,680	〃	〃
플랩밸브외1종	12-13-1-14026-00	〃	50,260,670	〃	〃
수중펌프	12132127300	제이엠아이(주)	128,211,440	〃	〃

※ 계약금액 변경 없음

❍ 연기사유 : 선행공종(토목,건축)지연에 따른 관급자재 납품시기 미도래

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

4		보고자 의견

❍ 선행공종(토목,건축) 지연에 따라 도급공사(1차) 및 관급자재 준공(납품)기한    연기가 불가피한 사항으로써

❍ 감리단 의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 내용과 같이 준공(납품)기한    변경내용을  관련부서(건설총괄부)에 통보하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 도급공사 준공기한 연기관련 감리검토 보고서 1부.

2. 관급자재 납품기한 연기관련 감리검토 보고서 1부.  끝.