투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	준공기한 연기 조치의뢰(금천교내진성능개선공사)

1. 시설보수과-574(2014.02.13.),공사감독1처-993(2014.2.11.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 “금천교내진성능개선공사”의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 금천교내진성능개선공사

나. 공사기간 : 2013.05.02 ~ 2014.02.28

다. 도 급 자 : 만국건설㈜ 대표 김효순

라. 준공기한연기 내역

○ 준공기한연기 : 당초 2014.02.28. → 변경 2014.03.31.

○ 연기사유 : 철도저촉구간 작업지연에 따른 절대공기 부족

○ 연기사유귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금부과여부 : 미부과

붙임 :  1. 준공기한연기의뢰서 1부

2. 준공기한연기 방침서 1부

3. 준공기한 관련서류 1부

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	정규용		시설보수과장	02/17 김찬구
협조자
시행	시설보수과-607	(		)	접수		(		)
우	150-080	서울 영등포구 도림로 145번지(구대림3동 711)	/
전화	3284-5469	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개