문서번호	기전과-726
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	02/17 민승기
협조
	주무관		조용학

『2014년 수방대비』

기전시설 일제점검 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

남부도로사업소

( 기  전  과 )

「2014년 수방대비」

기전시설 일제점검 및 정비계획

2014년 우기대비 기전시설 일제점검을 실시 보완 개선함으로써 시설물 관리에 철저를 기하고 유시시 즉각 대처함으로써 피해를 최소화 하고자 함.

▢ 점검대상

○ 지하차도 : 8개소

- 대방, 영등포, 신길, 사평, 잠수교남단, 동작, 염곡, 양재

○ 터 널 : 6개소

- 상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암1, 호암2

○ 가로등 및 경관조명

- 가로등 : 1,688등, 경관조명 9,645등

▢ 추진계획

○ 점검 및 정비기간 : 2014.2.17.~2014.4.30.

- 3차에 걸쳐 점검 및 정비시행

- 기간내 해빙기대비 점검 병행 시행

○ 1차 점검 및 정비

- 점검기간 : 2014. 2. 17.~ 3. 7

- 정비기간 : 2014. 3. 21일까지 정비조치

- 점 검 자 : 담당자 및 터널, 지하차도, 가로등 유지관리 직원

※ 해빙기 대비 기전시설 점검 병행 시행

○ 2차 점검 및 정비

- 점검기간 : 2014.3.24.~3.31

- 정비기간 : 2014.4.15.일까지 정비조치

- 점 검 자 : 담당자 및 터널, 지하차도, 가로등 유지관리 직원

▷ 1차 점검결과 미 조치된 사항 중점 점검

▷ 시설별 전문업체와 합동점검 ( 점검업체 점검비 지급 )

▪ 배전반 : 전기안전관리대행업체

▪ 비상발전기 : 발전기 수리 전문업체

▪ CCTV : CCTV 유지보수 전문업체

▪ 재방송설비 : 아함전자

▪ 원격감시제어설비 : SJ텔레콤

▪ 배수펌프 : 배수펌프 전문업체

○ 3차 점검 및 정비

- 점검기간 : 2014.4.17.~4.30

- 정비기간 : 2014.5.10.일까지 정비조치

- 점 검 자 : 담당자 및 터널, 지하차도, 가로등 유지관리 직원

▷ 사업소장 및 기전과장 합동점검

▷ 1~2차 점검결과 조치사항 점검 및 미 조치사항 중점 점검

※ 기간내 수방용 양수기 가동 훈련 및 지하차도 침수 대비 배수훈련 실시

○ 주요 점검사항

- 조명 부점등 및 CCTV 유지관리 상태

- 터널 지하차도 배전반 및 가로등 분전반 상태

- 비상발전기 가동 상태 및 UPS 상태

- 배수펌프 정상 가동 여부

- 가로등 점등상태 및 기울어짐, 기초 나사풀림, 전선 늘어짐 등

※ 점검표에 의해 점검 실시

▢ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치

- 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

붙임 : 1) 터널 및 지하차도, 가로등 점검표 각 1부.

2) 점검시설물 현황 1부.  끝.