문서번호	도로보수과-702
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	02/17 정진오
협조
	주무관		홍수종

【2013년 노면표시 유지보수공사(연간단가)】

정산설계변경 검토보고

2014.  2.   .

성동도로사업소

도로보수과

·

정산설계변경 검토보고

□ 관련근거

○ 건영 본 2013-303(2014.2.14)호 : 3차 설계변경 요청 건

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2013년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2013.  4. 22. ~ 2014. 2. 28.

○ 도  급  자 : ㈜우성산업공사  이상선

○ 도  급  비 : 291,440,000원

○ 공사개요 : 차선도색 231,895m, 차선제거 10,812m, 도로표지병 설치 102개, 도로표지병 제거 149개

□ 변경 사유

○ 공종별 물량 증․감에 따른 설계변경

□ 설계변경 내역

구 분	단위	수 량			비고
		당초	변경	증․감
차선 도색	m	231,895	230,746	-1,149
차선 제거	m	10,812	10,065	-747
표지병 설치	개	102	82	-20
표지병 제거	개	149	195	46

○ 공사비 변경내역                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	819,000,000	797,690,000	감21,310,000
도급비	412,400,000	392,930,000	감19,470,000
관급비	406,600,000	404,760,000	감1,840,000

□ 예산과목

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시선 도색 및 제거, 시설비(670,000천원)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비(도로굴착복구기금 114,550천원)

○ 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 보행환경개선, 자전거이용시설확충및관리, 자전거도로유지보수, 시설비(35,000천원)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 물량조정에 대한 정산설계변경을 시행하여 차선도색 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 정산설계변경내역서 1부.

2. 제비율검증결과 1부. 끝.