문서번호	시설보수과-607
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설보수과장	성동도로사업소장
진하영	최태석	박춘배	02/18 정진오
협 조

『2013도로시설물 세척용역』

설계변경 검토 보고-2차

2014. 02

성동도로사업소

(시설보수과)

『2013도로시설물 세척용역』 설계변경 검토 보고-2차

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2013 도로시설물 세척 용역』의 세척물량 변경

및 작업 변경사항에 따른 설계변경을 시행하여 세척수행에 만전을 기하고자 함.

1		용 역 개 요

용 역 명 : 『2013 도로시설물 세척 용역』

용역기간 : 2013년 3월 26일  ~ 2014년 2월 28일

용역개요 : 세척 대상 시설물 : 19개소

- 1종시설물 : 일반교량 3개소, 고가차도 1개소

- 2종 및 법정외 : 일반교량 4개소, 터널 2개소, 지하차도 9개소

도 급 액 : 261,508천원

도 급 자 : (주) 비에프디 대표 감 병 철

2		보 고 내 용

설계변경 사유

○ AI예방 교량 하부 조류 배설물 제거 및 세척에 따른 물량 증가

- 대상시설 : 7개소(정릉천교외 6개 시설물)

- 변경물량 : 5,087㎡ 증가

○ 동절기 제설작업으로 제설제 및 매량, 먼지로 오염된 도로시설물 일관 세척에 따른 물량 증가

- 대상시설 : 13개소(군자교 외 12개 시설물)

-  변경물량 : 14,075 ㎡ 증가

○ 예산절감을 위한 사업소 자체 직영반 및 보유 장비를 활용한 세척 시행

- 관련근거 : 2013년도로시설물 청결대책 변경계획보고(시설보수과-4443[2013.12.13.])

- 대상시설 : 13개소(워커힐고가외 12개소, 세척횟수 변경)

- 변경물량 : 23,854㎡ 감소

○ 변경사항

연 번	시설물명	변경 사항		비고
1	성북천교, 무학교 비우당교, 황학교 제기1교, 제기2교	교량하부 조류배설물 제거 및 세척		▲5,087㎡
2	신답고가차도, 청량1고가차도 청량2고가차도, 행당고가차도 제2마장교, 군자교, 성동교 장안교, 장평교, 정릉천교 무지개터널, 군자교동측지하차도 중랑지하차도	신규 증가 1회		▲14,075㎡
3	워커힐고가	4회->3회	세척횟수 감소	▼23,854㎡
	성북천교	3회->2회
	황학교	4회->2회
	무학교
	두물다리(청)
	고산자교
	비우당교
	이화교
	능산지하차도	4회->3회
	신내지하차도
	응봉지하차도
	서울숲1지하차도
	서울숲2지하차도

○ 용역비 변경 사항

구 분		당 초	변 경	비 고
총 용 역 비		261,508,340	244,286,900	감 17,221,440
도급비	공 급 가 액	237,734,855	222,079,000	감 15,655,855
	부 가 가 치 세	23,773,485	22,207,900	감 1,565,585
	도 급 비	261,508,340	244,286,900	감 17,221,440

예산과목

○ 도로시설관리, 도로시설물운영,  도로시설물 일상유지보수공사, 시설비  69,970천원

○ 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설물(교량관리) 일상유지보수공사, 시설비 230,000천원

3		향 후 계 획

상기 내용과 같이 시공물량 증감에 따라  [2013년도 도로시설물 세척 용역]의 설계변경 및

재계약 시행 후 용역 준공코자함.

붙임  설계변경내역서 1부.  끝.