투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전기공사 1차수 공사기한 연기 및 2차수 계약의뢰 (염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

우리 본부에서 시행하는 『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』과 관련, 원활한 사업 진행을 위해 아래와 같이 1차수 공사기한 연기 및 2차수 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사

나. 전기공사 1차수 공사기간 연장 및 2차수 계약의뢰 현황

구 분		금액(원)	공사기간		비고
			당초	변경
도급비	총차	392,170,740	’13.03.13.~’14.07.30	변경없음
	1차	100,000,000	’13.03.13.~’14.02.28	’13.03.13.~’14.07.30	증152일
	2차	292,170,740	착공일로부터 2014.07.30까지		금차계약

다. 계약업체 : ㈜투윈스컴  대표 박성하

라. 계약방법 : 장기계속공사

마. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따라 후속공정인 전기공사 시기 미도래

바. 귀책사유 및 지체상금부과여부 : 도시기반시설본부 및 미부과

사. 예산과목

- 염창2 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 염창2 빗물펌프장 시설용량 증대 ,시설비 및 부대비, 시설비(401-01).

- 방화  : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 방화 빗물펌프장 시설용량 증대 ,시설비 및 부대비, 시설비(401-01).

따로붙임  1. 1차수 공사기한연기 보고서 및 합의서 1부.

2. 2차수 발주 계획서 및 내역서  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	02/18 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-1898	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개