문서번호	도시철도토목부-1936
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		윤방식	02/18 이은상
협조
	주무관		윤원섭

지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

전면책임감리용역 계약금액 조정(총괄 3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

전면책임감리용역 계약금액 조정(총괄 3회)

공사장 안전사고 재발방지 개선대책에 따라 안전분야 감리원을 증원 투입하여 현장안전관리에 만전을 기하고자 함

<공사장 안전사고 재발방지 개선대책, 행정2부시장 방침 제318호, 2013.10.17.>

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지하철 9호선 3단계 919공구 전면책임감리용역

○ 용역기간 : 2009.11.18. ~ 2016.02.28.

○ 용역금액 : 5,827,815천원

○ 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 대표이사 박미례

□ 변경내용

○ 용역기간 : ’09.11.18 ~ ’16.02.28(변경없음)

○ 용역금액 및 투입인원

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
계약금액 (천원)	계	5,827,815	5,912,815	증 85,000
	기 계약	5,827,815	5,912,815		특별회계
	안전분야 감리 추가		85,000	증 85,000	일반회계
투입인원 (인․월)	기 계약	524	524
	안전분야 감리 추가	-	8	증 8

○ 변경사유

- 공사장 안전사고 재발방지 개선대책(전문 감리원 증원배치 계획)에 따라 현장 안전관리에 만전을 기하고자 안전전담 감리원 추가 투입

※ 투입계획

․ 대상 : 안전분야 1명(감리사보 수준)

․ 자격 : 안전분야 기사, 산업안전기사 자격 소지자로 2년이상 경력자 등

․ 기간 : ’14년 3월 ~ ’14년 11월(9개월)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 총괄 계약금액 조정하고 안전분야 감리원 1인 추가 투입하여 감리용역 업무시행에 만전을 기하고자 함

첨부 1. 감리단 공문 1부.

2. 변경내역서(감리 투입계획 포함) 각 1부.   끝.