문서번호	토목부-3092
보존기간	년
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		토목총괄과장	토목부장
김성권		김영수	02/19 노우성
협조
	주무관		최진우

설계변경 검토 보고(3차2회)

《월드컵대교 건설공사폐기물처리용역 》

2014. 2.

도시기반시설본부

(토  목  부)

설계변경 검토 보고(3차2회)

《월드컵대교건설공사 폐기물처리용역》

공사현황

◦ 공사규모 : 교량 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

◦ 용역기간 : 2011.09.22 ~ 2015.8.20

(3차 : 2013.01.25.~2014.2.28.)

◦ 도 급 비 : 350,829,000원

◦ 시 공 사 : 문화경기(주) 외1

◦ 감 리 사 : (주)포스코엔지니어링 외 1개사

설계변경 현황

관련근거 : 인프라토목-14-00333 (2014.2.17)

변경사유  : 본 공사(4차) 시행중 북단 램프구간에서 발생된 건설폐기물 성상과 당초 설계(아스콘)된 내용이 서로 상이함.

설계변경

• 전 체 분┎ 용역기간 : 변경없음

┖ 수    량 : 변경없음

• 3차 2회┎ 용역기간 : 변경없음

┖ 수    량

구 분	수량(단위ton)		증·감
	당 초	변 경
폐콘크리트	1,752	3,311	증)1,559
폐 아스콘	2,492	1,020	감)1,472

설계변경 내역(3차 2회)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총 괄	총 용역비	350,829,000	350,829,000	0
	공급 가액	318,935,455	318,935,455	0
	부가가치세	31,893,545	31,893,545	0
3차2회	총 용역비	79,310,000	79,310,000	0
	공급 가액	72,100,000	72,100,000	0
	부가가치세	7,210,000	7,210,000	0

조치계획

◦ 본 공사 책임감리업무를 수행하고 있는 (주)포스코엔지니어링에서 제출된 설계변경(3차 2회)을 검토한바 타당하기에 보고된 내용과 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.