문서번호	시설보수과-1124
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	02/19 이규상
협 조
	도로보수과장			김효식
	교량보수과장			안완순
	기전과장			박재경

2014년 수해안전대책관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  2.

강서도로사업소

2014년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2014년도 우기를 대비하여 지하차도내 배수펌프 등 각종   수방시설과 도로옹벽, 지하차도 등 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기 전까지 정비를 완료하여 풍수해를 예방하고자 함

* 관련근거 : 하천관리과-1879(2014.2.6.)

Ⅰ

점 검 대 상

도로 및 수방시설물

도로시설물 96개소

- 교량 26, 고가차도 12, 입체교차로 10, 터널 5, 지하차도 30,

복개도로 5, 절개지(옹벽) 8

수방시설물

- 배수펌프 46대, 비상발전기 12대 등

중점 점검사항

도로시설물 점검시

- 포장 균열․파손, 슬래브하부 균열․탈락, 철근노출, 누수, 박리․박락 등

- 교대, 옹벽 배면 배부름 현상 등 변위 여부

- 지하차도, 터널 내 배수로 퇴적물 여부 등

- 교량, 고가차도, 입체교차로 상 배수구 막힘 여부 등

터널, 지하차도내 수방시설물 점검시

- 비상발전기의 정상 가동 여부

- 수중펌프 정상 가동 여부 등

Ⅱ

추 진 계 획

점검 및 정비 기간

2014. 2. 19 ~ 2014. 4. 30

점검 방법

도로보수과 : ‘14년 해빙기 대비 도로사면(옹벽)안전점검 계획 수립 시행

시설보수과, 교량보수과 : 도로시설과 “해빙기 안전점검”에 의해     자체 점검계획 수립시행

기전과 : 수방대비 수중펌프 및 비상발전기 점검 등에 대한 자체   점검계획 수립 시행

점검 및 정비 일정

【1차 점검 및 정비】

- 기 간 : ‘14. 2. 19 ~ 3. 7까지(1차 점검후 3.21일까지 정비조치)

▷ 점검방법에 의거 점검․정비 실시

▷ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

【2차 점검 및 정비】

- 점검책임자 : 담당과장

- 기 간 : ‘14. 3. 24 ~ 3. 31까지(2차 점검후 4.15까지 정비 완료)

▷ 1차 점검결과 미조치된 사항을 위주로 중점 점검 및 정비 조치

▷ 기간내 정비가 곤란한 경우에는 '14. 4. 30까지 정비대책을 별도 수립

ⅢⅡ

행 정 사 항

담당부서별 자체점검 계획 수립, 점검 시행

시설보수과에서 점검 및 정비 결과 수합

- 1차 점검 지적사항 및 정비 결과 : 3.24일까지 하천관리과로 제출

- 2차 점검 지적사항 및 정비 결과 : 4.18일까지 하천관리과로 제출

⇒ 미 조치사항에 대해서는 4.30일까지 정비대책 포함

※ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 대책마련

- 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

재난관리시스템상에 시설․자원관리분야에 점검사항 등록 및 관리

첨 부 1. 도로시설물, 기전시설물, 도로옹벽 현황 각 1부.

2. 관련공문서 1부. 끝.