투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2013년 포장구간내 폐아스콘운반 및 처리용역-남부)

우리사업소에서 시행중인 2013년 포장구간내 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)시행코자 합니다.

가. 용역명 : 2013년 포장구간내 폐아스콘운반 및 처리용역(연간단가)-남부

나. 용역기간 : 2013.4.19 ~ 2014.2.28

다. 계 약 자 : (주)삼보이엔티 대표 김완기, ㈜동녘 대표 신종훈

라. 설계변경(정산)내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 감	비고
용 역 비	397,930,000	377,460,000	감 20,470,000

마. 변경사유 : 폐아스콘 처리량 감소(55,758톤 ⇒ 51,716톤)

바. 예산과목 : ①도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 (319,799,000원)

②도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비(57,661,000원)

붙  임 : 보고서 및 설계변경(정산)내역서 1부.  끝.

주무관	정철식		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	02/19 민승기
협조자	주무관	강종훈		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-989	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 711 도림로 264	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5443	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	대시민공개