문서번호	시설보수과-618
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	02/19 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

2014년 도로시설물 안전점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

성 동 도 로 사 업 소

〔시설보수과〕

2014년 도로시설물 안전점검 추진계획

우리사업소(시설보수과)에서 유지관리하고 있는 도로시설물의 안전

관리 강화를 위해 ｢2014년 도로시설물 안전점검 계획｣을 수립ㆍ시행

하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 방 향

계획적이고 예방적인 도로시설물 안전점검 추진

시민의 참여를 통한 신뢰받는 안전점검 활성화

Ⅱ		추 진 개 요

안전점검 기간 : 2014년 1월 ~ 12월

안전점검 대상(55개 시설물)                                (단위:개소)

구분		합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계		55		28	9			3	12	3
시설보수과	1종	9		5	1					3
	2종	16		6	2			3	5
	법정외	30		17	6				7

※ 정기점검은 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단 실시기간과 중복되는 경우에는

생략할 수 있음

⇒ 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부 고시 02010-1037호)

담당별 안전점검 대상

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 진하영(부)	14	1종	워커힐고가차도, 면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리 신답고가차도, 청량리1고가차도
2	김근수(정) 임승민(부)	14	1종	응봉교, 청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	임승민(정) 김근수(부)	14	1종	이화교, 비우당교, 청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 재2제기교 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도
4	진하영(정) 김근수(부)	13	1종	성북천교, 용비교
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도

※ C등급(4개소) : 장안교, 이문고가차도, 청량리1고가차도, 중랑교

공사중(2개소) : 응봉교(도시기반시설본부 토목부), 마장지하차도(성동구청)

안전점검 실시 근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 정기점검 : 1회 이상 / 반기

- 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한 때

※ 자체정밀점검(외부전문가) 23개소(사업비 : 143,826천원)

안전점검 방법

○ 자체안전점검

○ 시민대표, 시설안전자문위원 등 안전점검

Ⅲ		‘13년 점검실적

연번	구 분	점검기간	점검시설 (개소)	점검인원 (인)	지적건수(건)
					계	조치완료	조치중
	계	2013년	553	104	378	367	11
1	혹한기 안전점검	2013.01.01~02.28	55	4	58	58
2	설날대비 안전점검	2013.02.04~02.12	55	4	25	25
3	해빙기대비 안전점검	2013.02.20~03.29	55	28	71	71
4	상반기 정기점검	2013.03.04~06.30	55	6	45	45
5	상반기 특정관리대상 안전점검	2013.06.10~06.20	29	4	2	2
6	우기대비 안전점검	2013.04.25~05.10	55	4	11	11
7	재해취약시설 긴급점검	2013.07.23~07.24	55	4	18	18
8	추석대비 안전점검	2013.08.26~09.13	55	4	27	27
9	하반기 정기점검	2013.08.30~12.31	55	4	74	63	11
10	하반기 특정관리대상 안전점검	2013.09.26~11.20	29	4	0	0
11	겨울철대비 안전점검	2013.11.27~12.24	55	38	47	47

※ 1) 점검결과 미조치사항(11건) 2014년 조치(기보고, 시설보수과-339, 2014.1.27)

2) 정밀점검 및 진단 등 중복사항 제외

Ⅳ		‘14년 안전점검 계획

연번	구 분	점검기간												계	점검시설		비고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		외부전문가 합동점검	자체점검
	계													444	113	331
1	설날대비 안전점검													55	2	53
2	해빙기대비 안전점검													55	55
3	상반기 정기점검													55		55
4	상반기 특정관리대상 안전점검													29		29
5	우기대비 안전점검													55		55
6	하반기 정기점검													55		55
7	추석대비 안전점검													55		55
8	하반기 특정관리대상 안전점검													29		29
9	시민과 함께하는 안전점검													1	1
10	동절기 안전점검													55	55

‘14년 점검계획

세부점검 방법

○ 자체점검 : 정기점검, 긴급점검

※ 안전점검시 지반침하, 세굴 등 시기별 취약사항 점검

○ 시설안전자문단(외부전문가) 합동점검

- 전담주치의 지정 : 1종시설물(9개소), C등급 이하(4개소)

- 점검대상(55개소) : 합동점검(해빙기, 동절기)

○ 시민과 함께하는 합동점검

- 점 검 자 : 관할 구 시의원, 구의원, 통장, 주치의 등

- 대    상 : 1개소(이화교)

- 점검시기 : 2014. 10월 중 예정(별도 계획 수립)

○ 관학 합동점검, 대학생 안전점검 투어(지시에 의거 시행)

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 계획 수립 및 시행

○ 도로시설과 안전점검 계획을 반영한 세부계획 수립 시행

점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장 시정조치 또는 일상유지보수업체로 하여금 조치

○ 보수 예산 수반 및 구조적 사항은 별도 보수ㆍ보강 계획 수립 시행

○ 안전점검 및 조치결과는 도로관리시스템, FMS 입력 및 도로시설과에 제출

※ 안전점검 결과 미조치사항에 대하여는 조치완료시까지 관리

점검결과 조치

○ 점검수당 지급

- 안전점검 결과 보고서에 의거 수당 지급

※ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물                    안전자문단 운영, 사무관리비

- 점 검 수 당

구 분	점 검 수 당	비 고
외부전문가 자문위원	200,000원 / 인 ․ 회	∙ ′14년 엔지니어링대가 기준에 따라 지급 특급기술자 노임(247,598원/일) → 적용 : 200,000원/회
시의원, 구의원, 연구원, 시민	100,000원 / 인 ․ 회	- ‘14년 서울시 예산편성 잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당 지급 ∙ 기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시) → 적용 : 100,000원/회

끝.