문서번호	시설과-1081
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
이재복	함석주	02/19 배호영
협 조

2014년 전기설비 유지보수계획

2014. 2

중부공원녹지사업소

시 설 과

2014년 전기설비 유지보수 계획

▢ 설비 현황

○ 공원등

공원별	공원등 현황
	등주 (본)	등주별						등수 (개)	광원별
		강관	주철	스텐	목주	볼라드	기타(터널등)		메탈할라이드	CDM	NA	LED	기타 (EL,삼파장)
계	2,394	684	331	459	673	165	82	2,807	1,818	494	45	357	93
남 산	1,349	684	223	148	63	149	82	1,615	1,046	105	20	357	87
낙 산	260	-	45	154	55	6	-	299	283	-	10	-	6
용 산	78	-	-	68	-	10	-	140	130	-	10	-	-
훈련원	43	-	27	16	-	-	-	70	70	-	-	-	-
간데메	36	-	36	-	-	-	-	49	44	-	5	-	-
중랑 캠핑숲	208	-	-	73	135	-	-	208	208	-	-	-	-
북서울꿈의숲	383	-	-	-	383	-	-	389	-	389	-	-	-
창포원	37	-	-	-	37	-	-	37	37	-	-	-	-

○ 한양도성 경관조명

구분	투광등[개]		지중등[개]
합계	-	580	-	477
삼선	HQI-TS 150	152	HQI-TS 70	115
동숭	HQI-TS 150	135	HQI-TS 150	20
	HQI-TS 70	27	HQI-TS 70	7
			CDM-T 70	53
남산	NAV-TS 150	185	FL14	95
			HQI-TS 70	187
회현	CDM-70	52	-	-
	EL-11	29

○ 전기수전 설비

합계	남산분수대 수전반	공원등 분전함	한양도성 경관조명 분 전 함	실개천 동력반	열선 제어반	비고
110면	3면	59면	15면	31면	2면

▢ 2013년 전기설비 유지보수 실적

○ 2013년 공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) : 2013.03.08. ~ 2013.12.30.(160백만원)

- 1차작업 : 중랑캠핑숲 캠핑장 사무실 전기시설 개선외 2건

- 2차작업 : 회현지구 남대문방향 계단 조명 개선외 5건

- 3차작업 : 남측순환로검표소 차량진입안내판 선로 보수외 13건

- 4차작업 : 용산공원공원등 보수외 8건

- 5차작업 : 중랑캠핑숲 공원등주 누전차단기 설치 작업외 5건

- 6차작업 : 장충체육회 공원등 보수외 6건

- 7차작업 : 야외식물원 물레방아 전원설비 설치외 7건

○ 2013년 남산공원 조명설비 개선공사 : 2013.10.28. ~ 2013.12.03.(206백만원)

- 북측순환로 청사초롱 및 램프교체 (메탈150W→LED 30~50W)) : 154개

- 동국대길 주철주 글로브 등기구 교체 (메탈150W→LED 60W)) : 19개

- 후암약수터길 스텐레스주 등기구 교체 (메탈150W→LED 60W)) : 12개

- 남산별관 진입로 스텐레스주 등기구 및 암 교체 (메탈150W→LED 60W)) : 36개

< LED 교체 효과 : 북측순환도로 공원등 월별 전기요금 현황>

○ 한양도성 경관조명용 지중매설식 분전반 구매 : 2013.8.27. ~ 2013.09.09.(20백만원)

○ 남산공원 및 산하공원 직영 보수

- 남산 및 산하공원 전기설비 보수 및 민원사항 수시 처리

- 한양도성 경관조명 부점등 보수 등 : 188회

▢ 2014년 전기설비 유지보수 계획

○ 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 추진

- 추진기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 소요예산 : 150백만원

- 계약방법 : 일반경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

○ 조도가 저하된 노후 등기구를 LED 등기구로 교체

- 추진기간 : 2014. 6 ~ 2014. 10

- 사업대상 : 남산공원 및 간데메 공원 조명등 128개

- 소요예산 : 179백만원(관급자재 포함)

- 계약방법 : 일반경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 공원녹지정책과 재배정예산

○ 일상점검 보수 철저

- 추진기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 전기보수반 운영 : 4명(전기7급 2명, 공무·기간제 2명)

※ 전기 기술 자격증 소지 또는 경력 기간제 직원 1명 충원 필요

▢ 향후일정

○ 2014. 2. : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약 추진

○ 2014. 5. : LED 등기구 교체 계획 수립 및 예산 재배정 요청

○ 2014. 6. : LED 등기구 교체 공사 계약 추진

○ 2014. 10 : LED 등기구 교체 공사 준공

○ 2015. 2. : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 준공.

첨부 : 2014년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 내역서 1부. 끝.