투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	공사 설계변경 시행(전체8회,6차제4회,7차제3회)

우리본부에서 시행 중인「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체8회, 6차제4회, 7차제3회)을 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사

2. 공사기간 : 2008.3.10 ~ 2014.4.5(전체)

-6차 : ‘12.3.14~’14.2.28, 7차 : ‘13.10.08~’14.4.5.

3. 공 사 비 : 69,562백만원(6차 : 16,000백만원, 7차 : 8,334백만원)

4. 도 급 자 : 중앙건설(주)외 1개사

5. 예산과목 : (교통사업특별회계,도시개발특별회계)도시안전실도로계획과,도로건설,간선도로망확충,서부트럭터미널앞 지하차도건설,시설비및부대비,시설비

6. 설계변경내역

○변경내용                                                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	변경사유
전체	69,562,922,280	68,862,922,280	감)700,000,000	시공물량 조정
6차	16,000,000,000	15,300,000,000	감)700,000,000
7차	8,334,922,280	8,334,922,280	변경없음

7. 준공기한 : 변경없음

붙 임 1)보고서 1부.

2)변경내역서 3부.  끝.

	토목부장
주무관	박천용		광역도로과장	최순철		토목부장	02/19 노우성
협조자	★경리과장	최영미
시행	토목부-3063	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개