과 장		02/19 국중진		팀 장	김홍기		심사자	하승환		설계자	최영서	설 계		심 사		결 재
												2014년 2월		2014년 2월
설 계 서(6차 변경)
	공사명 : 2013년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)-6차 설계변경
	구 분					금 액									비 고
						당 초			변 경				증 ․ 감
	총 공 사 비					1,193,511,000			1,137,400,000				감 56,111,000
	도급비		공 급 가 액			1,085,010,000			1,034,000,000				감 51,010,000
			부 가 가 치 세			108,501,000			103,400,000				감 5,101,000
			계			1,193,511,000			1,137,400,000				감 56,111,111
□ 공사개요 ○ 소파포장복구 당초 88a -----> 변경 83a ○ 긴급복구반운영 당초 56일 -----> 변경 42일 ○ 제설작업 당초 1식 -----> 변경 1식(공종별 수량변동)