투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	천재지변에 따른 각종 공사기간 연장

1. 동물복지과 – 758호 및 759호(2014. 2. 18)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련, 천재지변으로 인하여 공사가 지연됨에 따라 아래와 같이 공사기간를 연장하고자 합니다.

가. 변경내역

공 사 명	업 체 명	공 사 기 간		변 경 사 유	지체상금
		당 초	변 경
기린보정틀 제작설치 공사	㈜케이투이엔지	2014.2.15 까지	2014.2.24까지	-조류독감 발생에 따른 출입 제한 -기온 급강하로 바닥이 동결되어 기초공사 난이 -혹한기 기린방사 불가로 작업중지	천재지변에 의한 공사기간 연장으로 지체상금 미부과
유인원관 망토원숭이 방사장 정비 공사	㈜희원조경	2014.2.17 까지	2014.2.28 까지

끝.

★주무관	차준호		동물복지과장	이달주		동물원장	02/19 노정래
협조자
시행	동물복지과-782	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7741	/전송	02-500-7996	/	chadoli@hanmail.net	/	대시민공개