문서번호	도로보수과-1596
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
우창원		이규철	02/20 김만수
협조
	주무관		김영용

공사 발주계획

(2014년 포장도로 긴급복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 포장도로 긴급복구공사 발주계획

우리사업소 2014년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)의 예산재배정에 따라 우리사업소에서 관리하는 도로의 거북등 균열 및 소파(포트홀) 발생이 예상되는 지역을 정비하여 시민통행 불편이 최소화 될 수 있도록 공사시행에 철저를 기하고자 함.

관련근거

○ 2014년도 노후포장도로 정비공사 예산 재배정(도로관리과-2032,□14.2.6)

- 재배정액 : 2,090백만원(상반기 1,500백만원, 하반기 590백만원)

○ 2014년 도로보수사업 추진계획 (도로보수과-1343,□14.02.12)

공사기간

○ 착공일로 부터 ~ 2015. 2. 28일 까지

공사방법

○ 포장도로 긴급복구공사 시방서에 의거 공사시행

○ 차수별 작업지시에 의하여 공사를 시행하되,

긴급 사항(폭우, 동공 등) 발생시에는 구두 작업지시에 의거 선 작업 실시하고, 사후 보고서 작성 및 문서 작업지시

소요예산

(단위 천원)

계	본 공 사	폐기물처리	노면표시 (설계및감리비포함)	굴착복구공사 (우기철 소파보수)
1,500,000	총 공 사 비 : 1,277,947 - 도 급 비 : 767,569 - 관 급 비 : 450,378 - 이 전 비 : 60,000	66,467	55,586	100,000

※ 장마철 폭우로 인한 소파(포트홀)을 조속히 보수코자 포장도로 긴급복구 예산중 100백만원을 도로굴착복구공사(연간단가)에 포함 발주

검토의견

○ 2014년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)는 긴급공고로 발주 시행

- 발주 : 제한경쟁(지역제한)

※ 지역제한 : 전문공사로 추정가격 7억원 미만

(지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준)

○ 포장도로 긴급복구공사에 따른 폐기물 처리용역 및 노면표시공사는 2014년 노후포장도로 정비공사의 폐기물 처리용역 및 노면표시공사와 통합하여 발주 시행

○ 포장도로 긴급복구공사 예산중 100백만원은 도로굴착복구공사에 포함하여 발주하고 장마철 소파(포트홀) 다량 발생시 보수작업 투입

○ 하반기 배정되는 예산은 별도 발주없이 상반기 발주공사에 포함 설계변경 시행

예산과목

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발),

노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

향후계획

○ 2014. 02. : 계약심사 및 발주

○ 2014. 03. : 공사계약 및 착공

○ 2014. 03. ~ 2015. 02 : 긴급복구공사 물량 현장실사

○ 2014. 03. ~ 2015. 02 : 공사시행

행정사항

○ 유지관리과정 도로파손, 응급사항 등 현장상황에 따라 정비 우선순위 결정

○ 여름철 장마비로 인하여 소파(포트홀)가 다량 발생할 때에는 포장도로 긴급복구공사(연간단가) 및 도로굴착복구공사(연간단가) 계약업체를 활용하여 파손된 도로에 대하여 긴급복구한 후 예산부족시에는 낙찰차액 사용

붙임 : 1. 2014년 포장도로 긴급복구공사 설계 내역서 1부.

2. 예산산출내역(공사별) 1부.

3. 예산재배정 통보 1부.

4. 2014년 도로보수사업 추진계획 1부.  끝.