문서번호	기전과-1971
결재일자	2014.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장		강서도로사업소장
하상철	한영호	박재경		02/20 이규상
협 조

2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02

가

강서도로사업소

기전과

- 2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(정산) 계획보고

2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)에 대하여 기존 계약물량 변경등으로 인한 설계변경(정산) 사유가 발생하여 설계변경(정산) 시행코자 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

□ 공 사 명 : 2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 공사개요 : 경관조명 유지보수 1식

□ 공 사 비 : 금26,521,287원(도급비26,521,287원)

□ 공사기간 : 2013. 03. 01 ~ 2014. 02. 28

□ 도 급 자 : (주)세명종합전력

정산내용

[단위 : 원]

구 분	당초금액	변경금액	금액(증,감)	사 유	비 고
재료비	9,590,115	-	감)9,590,115	보험료 미납부 및 부대경비 감액
노무비	7,034,677	7,466,234	증)431,557
경 비
산출경비	2,714,424	11,238,119	증)8,523,695
산재보험료	260,283	276,250	증)15,967
고용보험료	55,574	58,983	증)3,409
기타경비	1,030,737	462,906	감)567,831
건강보험료	108,128	-	감)108,128
연금보험료	158,376	-	감)158,376
노인장기요양보험료	7,082	-	감)7,082
일반관리비	1,257,564	1,170,149	감)87,415
이윤	1,893,302	3,100,087	증)1,206,785
공급가액	24,110,261	23,772,728	감)337,533
부가가치세	2,411,026	2,377,272	감)33,754
도급공사비	26,521,287	26,150,000	감)371,287
총공사비	26,521,287	26,150,000	감)371,287

설계변경 사유

□ 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료) 및 부대경비       정산에 따른 감액

설계변경 금액

[단위 : 원]

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공사비		26,521,287	26,150,000	(감) 371,287
도급액	공사원가	24,110,261	23,772,728	(감) 337,533
	부가가치세	2,411,026	2,377,272	(감) 33,754
	계	26,521,287	26,150,000	(감)371,287

조치 의견

□ 상기 변경사유와 같이 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료의 미납부로 인한 보험료 및 부대경비(금액 371,287원) 감액부분을 반영한 사항으로, 물량증감사항이 적정하게 반영되었다고 사료됨으로 설계변경(정산) 시행하고 준공처리 하고자 합니다.

붙임 :  설계변경 내역서 1부.  끝.