투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(난지천공원 테마놀이터 재조성공사(긴급))

1. 시설과-819호(2014.2.19.)와 관련됩니다.

2. 『난지천공원 테마놀이터 재조성공사(긴급)』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 알려 드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명: 난지천공원 테마놀이터 재조성공사(긴급)

나. 계 약 자: 성림조경건설(주) 대표 유환천

다. 계약기간: 2013. 10. 14. ~ 2014. 2.28

라. 계약금액: 금279,507,000원

마. 변경사항: 준공기한 연기(2013.12.25. → 2014.04.25.)

바. 변경사유: 동절기 하자발생우려로 인한 탄성포장재 공사품질확보 등

붙임 : 1.변경계약서 1부

2.합의각서 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	이수정		주무관	조기환		공원운영과장	02/20 조준수
협조자
시행	공원운영과-2900	(		)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산2동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5518	/전송	300-5527	/	sujeong818@seoul.go.kr	/	부분공개(7)