문서번호	평생교육과-1579
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	평생교육기획팀장	평생교육과장
송계수	송인상	02/21 김정호

은평학습장 간판설치관련

지체상금 면제 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

은평학습장 간판설치관련

지체상금 면제 검토보고

은평학습장 간판설치와 관련하여 은평학습장 인테리어 공사일정 변경에 따른 우리부서 요청으로 기한내 간판설치가 완료되지 못하였기에 해당업체의 지체상금 부과 면제에 대해 검토보고 함

▢ 납품개요

○ 용 역 명 : 2013년도 은평학습장 싸인물 설치공사

○ 납품기간 : ’13.12.5 ~ ’14.1.13

○ 업    체 : 씨엠에드

○ 용역내용 : 은평학습장 전면간판, 실내싸인 및 표지 설치

○ 추진경과

- ’13.12. 5  : 수의계약 체결

- ’13.12.18  : 인테리어 공사일정 변경(당초 ’14.1.24 → 변경 2.10)

- ’14. 2.21  : 간판설치 및 실내 싸인물 설치

▢ 면제사유

○ 업체에서 기한내 납품이 가능하였으나 내부 인테리어공사 계약 변경과 도로변 간판설치에 따른 은평구청 협의에 따른 우리부서 요청으로 납품이 지연되었음.

○ 이에 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제90조 의거 지체상금 면제 요청