과 장					02/21 박춘배	심사자	최태석	설계자	김근수		설 계		심 사			결 재
											2014년 02월		2014년 02월
설계변경(4차-최종)내역서 당초: 상단, 변경: 하단
	2013년 교량 및 복개구조물 일상유지 보수공사(변경설계서)
	구 분					금 액									비 고
	총 공 사 비					일금 오억사천칠백삼십구만이천원정				(\		547,392,000		)
						일금 오억사천칠백삼십구만이천원정				(\		547,392,000		)
	도급비		공 급 가 액			일금 사억구천칠백육십이만구천구십이원정				(\		497,629,092		)
						일금 사억구천칠백육십이만구천구십이원정				(\		497,629,092		)
			부 가 가 치 세			일금 사천구백칠십육만이천구백팔원정				(\		49,762,908		)
						일금 사천구백칠십육만이천구백팔원정				(\		49,762,908		)
			계			일금 오억사천칠백삼십구만이천원정				(\		547,392,000		)
						일금 오억사천칠백삼십구만이천원정				(\		547,392,000		)
공사개요 : 1. 콘크리트 단면보수 778.0 ㎡ ⇒ 638.0 ㎡ 2. 콘크리트 표면보수 1,017.4㎡ ⇒ 817.4 ㎡ 3. 조류 접근방지망 0 ㎡ ⇒ 2,190.0 ㎡