함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	범한엔지니어링종합건축사사무소 책임감리원 귀하
(경유)
제 목	암사고도 감리원(소방,기계,전기,계측) 투입 변경 승인통보

1. 암사고도(공) 2014-68호(2014.02.20.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 감리원(소방,기계,전기,계측)에 대하여 계약금액의 변경없는 투입계획 변경(근무일수조정)에 대하여 아래와 같이 승인통보하오니 감리감독 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

가. 변경내용

감리원	당 초	변 경	증 감	비 고
소 방	-	‘14.01.01~’14.06.30 (2.454월)	증 2.454	승 인
전 기	‘14.02.12~’14.11.30 (9.590월)	‘14.02.12~’14.11.12 (8.454월)	감 1.136	″
기 계	‘14.03.14~’14.11.30 (8.590월)	‘14.03.01~’14.11.12 (8.454월)	감 0.136	″
계 측	‘14.02.27~’14.11.30 (9.090월)	‘14.03.14~’14.11.30 (8.545월)	감 0.545	″

※ 계약금액 변경없음. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	서기종		기전설비과장	서대훈		생산부장	02/21 박용철
협조자	주무관	유통희
시행	기전설비과-1092	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개