투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	2013년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)』정산 설계변경(제4회)

우리사업소에서 시행중인 『2013년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)』 설계변경(제4회)을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 특별시도상 불량맨홀정비공사(연간단가계약)-강서

나. 공사기간 : ‘13.04.26~’14.02.28

다. 공사개요 : 930개소(주간595개소, 야간335개소)

라. 도 급 자 : 태평림건설 주식회사 대표이사 이동균

마. 도 급 비 : 695,000,000원

바. 변경내역

(단위:  원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도 급 비	공급가액	631,818,182	631,818,182	-
	부가가치세	63,181,818	63,181,818	-
	계	695,000,000	695,000,000	-
공사기간		‘13.04.26 ~ ’14, 02 28	변경없음	-

사. 변경사유 : 준공에 따른 단순물량 증.감

아. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

첨부 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부  끝

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤옥진		도로보수과장	02/21 김효식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1365	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천길(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/	jm0756@seoul.go.kr	/	대시민공개