함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	2013, 2014년 광화문광장 제설작업용역 설계변경(정산) 시행 및 계약요청

1. 역사도심관리과-1660호(2014.2.19)와 관련 입니다.

2. 우리 과에서 진행중인 「2013, 2014년 광화문광장 제설작업용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)코자 하오니 변경계약하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2012, 2013년 광화문광장 제설작업용역

나. 용역개요 : 광화문광장

다. 계약금액 : 금 43,463,200원

라. 용역기간 : 2013.11.15 ~ 2014.2.28

마. 용역회사 : 정우산업 대표 오광열

바. 설계변경사유 : 제설작업 실제 투입인력으로 변경

사. 예산과목 : 도심재창조역사, 관광문화사업, 도심활성화, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

아. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
총 용 역 비		43,463,200	11,935,000	(감) 31,528,200
도급비	공 급 가 액	39,512,000	10,850,000	(감) 28,662,000
	부가가치세	3,951,200	1,085,000	(감) 2,866,200
	계	43,463,200	11,935,000	(감) 31,528,200

따로붙임 : 1. 설계변경(정산) 보고서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.     끝.

	역사도심관리과장
주무관	강천수		도심관리팀장	백인호		역사도심관리과장	02/21 이정화
협조자
시행	역사도심관리과-1751	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110, 11층	/
전화	02-2133-8506	/전송	02-2133-0742	/	kang0937@seoul.go.kr	/	대시민공개