문서번호	도로보수과-1191
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
유현선	박일연	손수희	02/24 송영배
협 조

관내포장도로 굴착복구공사

설계변경 검토보고(최종, 4차)

2014. 2

동부도로사업소

(도로보수관)

관내포장도로 굴착복구공사

설계변경 검토 보고(최종)

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』와 관련,시공물량 증․감사항 및 신규공종이 발생하여 검토하고 그 결과를 보고드림

	1		공 사 개 요

공 사 명 : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

공사개요 : 소규모포장복구 A=289.5a, 차로단위복구 A=1,058.5a

공사기간 : 2013. 3. 29  ~ 2014. 2. 28

도 급 비 : 2,909,720천원

도 급 자 : 아하엔지니어링(주) 대표 김보경

	2		주 요 변 경 내 용

❍ 우리사업소 관내 자치구청장으로부터 굴착허가되어 우리사업소에 복구  의뢰한 구간의 굴착복구물량 증․감으로 인한 계약물량 조정 및 긴급소파보수(대기) 공종 추가

❍ 굴착복구 물량 증․감에 따른 관급자재 계약물량 조정

❍ 2014년 노후포장도로 정비공사 구간 코어 채취 신규공종 반영

(도로보수과-893(2014.2.14.))

❍ ‘13/14년 제설대책 민간용역 계약물량 증․감사항 및 제설차량선탑자 신규공종 반영

❍ ‘14년 제설대책 사무관리비 재배정 예산(301,000천원)을 ‘13/14년 제설대책 민간위탁용역비(90,076천원)로 전환하여 사용

	3		조 치 계 획

❍ 자치구에서 우리사업소로 복구의뢰한 굴착복구 물량 변경사항을 반영하여 설계변경 시행하고자 하며,

❍ ‘14년 제설대책 사무관리비 재배정 예산중 90,076천원을 제설대책 민간위탁용역비로 사용

▶ 주요설계변경내역

- 굴착복구공사 주요변경사항

┏ 아스팔트 포장(소규모굴착복구) : 289.5a  →  288.9a(감 0.6a)

┣ 아스팔트 포장(차로복구)       : 1058.5a → 1,052.7a(감 5.8a)

┗ 긴급소파보수(대기) 공종 추가 : 47시간

구 분		계약물량(a)	변경물량(a)	증 ․ 감	비 고
소규모포장복구		289.5	288.9	감 0.6
소 계		1058.5	1052.7	감 5.8
차로복구	평삭후 덧씌우기 (20a미만기준)	328.5	325.1	증 63.5
	평삭후 덧씌우기 (50a기준)	730.0	727.6	증 140.0

- 관급자재비 변경사항

구 분	규 격	계약물량 (톤)	변경물량 (톤)	증 ․ 감	비 고
아스콘	계	28,860	28,246	감 614
	#67	14,460	14,319	감 141
	#78	200	170	감 30
	#467	13,800	13,757	감 43
	#67(재생)	400	-	감 400

- 코어채취 작업수량 : 172개소

- 제설대책 민간용역 주요변경사항

┏ 제설상황요원 대기(주간) : 150일 ⇒ 206일(증 56일)

┣ 제설상황요원 대기(야간) : 100일 ⇒ 104일(증 4일)

┣ 제설작업(차량) : 100시간 ⇒ 491시간(증 391시간)

┗ 제설차량 상시대기 : 450일 ⇒ 904일(증 454일, 8대)

- 설계변경 예정금액

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	증 ․ 감(원)	비고
총 공 사 비	4,895,700,000	4,934,170,000	증) 38,470,000
도 급 비	2,909,720,000	2,963,990,000	증) 54,270,000
관 급 비	1,985,980,000	1,970,180,000	감) 15,800,000

※ 예산과목 : 도시안전, 도로시설물관리, 도로굴착복구지원,

도로굴착복구, 시설비및부대비, 시설비(도로굴착복구기금)

도시안전, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,

노후포장도로유지보수, 시설비및부대비, 시설비

도시안전, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,

노후포장도로유지보수, 시설비및부대비, 사무관리비

도시안전, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,

제설대책추진, 사무관리비

붙 임 : 설계변경내역서 1부.  끝.