문서번호	도로보수과-1188
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
김종섭	박일연	손수희		02/24 송영배
협 조
	기전과장		김대진
	주무관		김경수
	주무관		이문희

'13/14년 제설대책 민간위탁용역

설계변경(정산) 및 제설작업 변경계획

2014. 2.

동부도로사업소

(도로보수과)

‘13/14년 제설대책 민간위탁용역

설계변경(정산) 및 제설작업 변경계획

기상청 기상예보(1개월)에 따르면 3월상순의 기온이 평년(1~2℃)과 비슷하고 강수량은 평년보다 적을 것으로 전망되어, 민간위탁 용역기간을 2월26일까지로 단축 시행하고, 민간용역 작업물량 증가에 따른 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

Ⅰ		제설 민간위탁용역 추진현황

용 역 명 : ‘13/14년 제설작업 민간위탁용역(연간단가)-동부

용역기간 : ‘13. 11. 15 ~ ’14. 2. 28.

도 급 자 : 아하엔지니어링(주) 대표 김보영

작업현황 : 총23회(보강13회, 1단계 9회, 2단계1회)

Ⅱ		제설 민간위탁용역 추진경과

‘13.03.07 : 민간용역 발주(예산액 : 100,000천원)

- 굴착복구공사에 포함하여 발주

‘13.03.26 : 공사계약(84,970천원)

‘13.12.17 : ’13년 노후포장도로유비보수 및 제설대책 사무관리비 집행잔액 사용하여 설계변경(당초 84,970천원 ⇒ 변경 111,221천원)

‘14.02.24 : 용역비 정산시행(당초 111,221천원 ⇒ 변경 201,300천원)

Ⅲ		주요 보고내용

제설민간용역은 ‘2013년도 제설대책 사무관리비 100백만원으로 굴착복구공사(연간단가)에 포함하여 발주하였으나, 제설민간용역은 2개년도에 걸쳐 추진되는 사업으로써 현재 부족예산(90,076천원)에 대하여 ‘14년 제설대책 사무관리비 재배정 예산(310,000천원)중 일부(90,076천원)를 사용하여 정산시행하고자 함.

제설대책 민간위탁용역은 계약기간이 ‘14년2월28일까지이나, 기상청 기상전망(1개월) 확인 결과 3월상순의 기온이 평년(1~2℃)과 비슷하고 강수량은 평년보다 적을것으로 전망되어, ’13년도 예산회계 집행 마감기한인 ‘14년2월28일까지 용역비 지출을 위하여 용역기간을 ‘14.2.26일까지로 조정하고자 함.

제설작업시간 등 주요 변경내역

▶ 2014년 2월 26일 종료시 (실 종료시간 ‘14.2.27(09:00))

- 제설상황요원 대기(주간) : 150일 ⇒ 206일(증 56일)

- 제설상황요원 대기(야간) : 100일 ⇒ 104일(증 4일)

- 제설작업(차량) : 100시간 ⇒ 491시간(증 391시간)

- 제설차량 상시대기 : 450일 ⇒ 904일(증 454일, 8대)

Ⅳ		설계변경 추진현황

▶ 계약기간  : 당초 2013.11.15 ~ 2014.02.28.

변경 2013.11.15 ~ 2014.02.26.

▶ 설계변경 시행

(단위 : 천원)

계약 금액	변경 금액	증∙감	기원인행위액 (굴착복구 포함)	부족 금액
111,221	201,300	증 90,079	111,224	90,076

※ 기원인행위액(제설사무관리비 90,161천원, 노후포장사무관리비 21,063천원)

※ 부족한 금액은 ‘14년 제설대책 사무관리비 재배정 예산 사용

(확보예산 310,000천원 - 금회사용 90,076천원 = 잔액 219,924천원)

Ⅴ		조 치 계 획

민간용역은 ‘14.2.26일자로 준공 처리

‘14.3.15까지 기상예보에 따른 비상발령시 직영장비를 최대한 활용

▶ 보강발령시(직영차량 3대)       ⇒ 1단계로 상향근무(직영차량 6대)

▶ 단계별 비상발령시(예비차량포함) ⇒ 2단계로 상향근무(직영차량 7대)

※ 부서별 상황근무자 및 선탑직원 포함하여 제설대책 상향근무(보강발령시 ⇒ 1단계발령)

제설작업량 증가에 따른 부족용역비(약 90,076천원)에 대하여 ‘14년 제설대책 사무관리비를 사용(90,076천원)하여 정산 시행

▶ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 제설대책추진,

일반운영비, 사무관리비.

붙 임 : 1. ‘13/14년 제설민간위탁용역 작업내역(정산) 1부.

2. 기상청 기상전망(1개월) 1부.

3. 보강 및 단계별 비상발령시 근무계획 1부.  끝.