투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사 1차)

우리 본부에서 시행 중인 「신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사 1차」 의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공사개요

가. 공사명 : 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사(1차)

나. 공사금액 : 총차 869백만원 (1차 100만원)

다. 공사기간 : 2013.10.01.~ 2014.06.30

(1차 : 2013.10.01.~2014.02.28.)

라. 시공사 : ㈜성림파워넷

2. 준공기한 연기의뢰 현황

구분	계약금액(원)	당 초	변 경	비 고
전기 총차	868,774,500	‘13.10.01 ~ ’14.06.30	변경없음
전기 1차	100,000,000	‘13.10.01 ~’14.02.28	‘13.10.01 ~’14.04.30	증 61일

3. 연기사유 : 선행 공정인 토목공사 지연으로 인한 전기공사 시공여건 미조성

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김홍석		시책사업과장	이흥복		설비부장	02/24 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-2160	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관 2동 2층)	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8646	/전송	3708-8659	/	khs25@seoul.go.kr	/	대시민공개