문서번호	설비부-2149
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김홍석		이흥복	02/24 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고

「신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사(1차)」

2014. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

준공기한 연기 검토 보고

「신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사(1차)」

「신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사(1차)」추진 중 감리단으로부터 준공기한 연기 요청이 있어 이를 검토하여 보고함.

Ⅰ		사업 개요

공 사 명 : 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사(1차)

공사금액 : 869백만원 (1차 100백만원)

공사기간 : 2013.10.01 ~ 2014.6.30.(1차:2013.10.01.~2014.02.28)

시 공 사 : ㈜성림파워넷

감 리 사 : ㈜동해종합기술공사 외 1개사

Ⅱ		검토 근거

2014.02.18 : 준공기한 연기원 제출(시공사 → 감리단)

2014.02.20 : 감리단 준공기한 연기 보고 [신촌감 제2014-72호]

Ⅲ		연기 사유

교통규제심의 및 아현고가 철거공사 등의 선행공정(토목공사) 지연에따라 후속공정인 전기공사의 시공여건이 조성되지 않아 준공기한 연기 필요

Ⅳ		연기 현황

구 분	계약금액(원)	당 초 (계약기간)	변 경 (계약기간)	비 고
전기 총차	868,774,500	‘13.10.01 ~ ’14.06.30	변경없음
전기 1차	100,000,000	‘13.10.01 ~ ’14.02.28	‘13.10.01 ~ ’14.04.30	증61일

Ⅴ		조치 의견

선행공정 지연에따른 시공여건이 조성되지 않아 발생한 불가피한 사항으로 감리단의 검토 보고와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

지체상금 부과여부 : 미부과

계약부서(재무과)에 준공기한 연기의뢰

따로 붙임 : 준공기한 연기 요청서 1부. 끝.