투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(북악터널내부보수보강공사)

1. 시설관리공단 공사감독2처 – 1710(2014.02.20)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 발주하여 시설관리공단에서 감독업무 위탁수행중인 북악터널내부 보수보강공사에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 북악터널 내부 보수보강공사

나. 공사기간 : 2013.07.30 ~ 2014.02.28

다. 공사개요

- 표면보수 내오염(천장): A=12,760㎡

- 터널조인트 보수: L=1,875m, 부대공 1식

라. 도 급 자 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배

마. 변경사유 : 물량 증․감

바. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비고
총 공 사 비		1,799,336,000	1,780,702,000	감)	18,634,000
도급비	공급가액	1,635,760,000	1,618,820,000	감)	16,940,000
	부가세	163,576,000	161,882,000	감)	1,694,000
	계	1,799,336,000	1,780,702,000	감)	18,634,000

사. 예산과목 : 도시개발특별회계,도시안전실,도시안전실도로시설과,도로시  설관리,터널시설관리,북악터널내부보수보강공사,시설비(401-01)

첨  부 : 설계변경(정산) 관련서류 1부.끝.

★주무관	김발현		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	02/24 이승진
협조자	관리단속과장	정수현		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-1258	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개