문서번호	요금과-3371
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강남수도사업소장
김종진		김형기	02/24 김광식
협조	급수운영과장		이경로
	시설관리과장		원의덕

'14년 유수율향상 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
누수방지과-813(‘14.1.29)	해	당 없	음	비 사 업

2014. 2

강남수도사업소

요 금 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 유수율향상 추진계획

상수도 공급량의 효율적인 감축을 위한 급수시설 정비, 조정량 증대를 위한 심사강화 및 과학적인 공급량 관리 등을 통하여 유수율을 향상코자 함

Ⅰ 유수율 현황 및 추진방향

2014년 유수율목표

❍ 유수율 목표 : 97.00%(전년대비 0.01% 증) - 2012년 실적 96.56%

유수율 목표 97%

누수탐지, 관 정비로 누 수 저 감

유수율 낮은지역 집중 관리

정확한 검침 및 심사 강화

일일 공급량 분석 관리

연도별 유수율현황                                (단위 : %)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
유수율 목표	92.1	94.63	94.51	94.58	95.63	95.63	96.99
유수율 실적	94.2	94.09	94.78	95.79	95.03	97.60	96.56
증감율(%)	2.1	-0.54	0.27	1.21	-0.60	1.97	-0.43

추진방향

❍ 누수탐지 및 노후관, 불용관 정비를 통한 상수도관 누수방지

❍ 중블록별 공급량 추이 검토 및 가압급수 지역의 효율적 관리

❍ 누락없고 착오없는 검침 및 적극적인 심사분석 강화

❍ 유수율제고를 위하여 정기적인 자체점검 및 관리

‘13년도 유수율 현황 및 분석

2013년도 유수율 현황

❍ ‘13.1~12월 유수율 : 96.56% [전년대비 1.04% 감소]

- 공급량 142,878천㎥ [전년대비   334천㎥(0.23%) 감소]

- 조정량 137,960천㎥ [전년대비 1,809천㎥(1.29%) 감소]

유수율감소 사유분석

○ 공급량 소폭 감소

- 누수취약지역을 선정, 집중탐지로 누수발생을 최소화하였고, 송․배수관       정비공사 등을 통한 노후관 교체 사업으로 누수요인을 사전에 방지,        2012년 대비 334천㎥ 감소(감소율 0.23%)

․ 누수탐지 : 252건, 방지량 74천㎥ / 송․배수관정비공사 : 6건, 3,814m 정비

․ 배․급수관정비공사 : 2건, 2,433m 정비 / 고장 및 노후된 밸브 107건 교체

※ 테헤란로 오피스빌딩 공실로 ‘13.12월부터 공급량이 감소추세

․ 전년동기 대비 13.12월 245천㎥ 감소, 14.1월 886천㎥ 감소, 14.2.23현재 393천㎥ 감소

○ 조정량 대폭 감소

- 경기침체와 임대료 상승 등으로 강남 테헤란로 상업지역의 기업체들이       타지역으로 이전하고, 이상 고온으로 전년에 비하여 동파방지용 물         흘림이 줄어, 2012년 대비 1,817천㎥ 감소 (감소율1.29%)

․ 강남권 오피스빌딩 공실률 증가

’12.1분기(2.84%) → ‘12.4분기(5.26%) → ’13.2분기(5.33%)→ ’13.4분기(6.74%)

․ 테헤란로 대기업(6개)과 IT업체(400여개)의 사옥이전, 주간상주인구 감소 등

○ 추진상 문제점 및 향후대책

- 공급량 감소대책의 일환으로 ①누수탐지 ②기존관철거 ③불용관정비 ④유수       장애 상수도관 이설은 대부분 목표 달성하였으나, 가압구역에 대한 관압 등 상시       점검 및 과학적인 공급량관리 등 체계적인 시스템관리가 지속적으로 요구됨

- 아울러 조정량 증대를 위하여 다량급수처 중점관리로 사용량 격증․감에 대한       지속적인 점검과 분석 및 신․개축지에 대한 적극적인 조례위반 단속이 필요함

Ⅱ 추진목표 및 중점추진과제

유수율 향상을 위한 단위사업별 추진목표

구 분	누 수 탐 지	배급수관 정 비	송배수관 정 비	불용관 정 비	중블록 유수율관리	가압급수 지역관리	재개발․재건축 지역관리
본부 배시	210건	4.34㎞	4건	0.8㎞	6개 블록	20개소	4개소

※ 아연도강관 정비는 본부일정에 따름

부서별 중점추진 과제

분야별	중 점 추 진 과 제	추진부서
공급량 관리	① 체계적인 누수탐지 ◦ 탐지목표 : 210건 ◦ 취약지역 및 누수다발지역 집중적인 반복 탐사	급수운영과
	② 배급수관 정비 ◦ 세척갱생관 정비목표 : 3.0㎞ ◦ 흑PE관 정비목표 : 1.34㎞	급수운영과 시설관리과
	③ 송․배수관 정비 ◦ 송배수관 정비목표 : 3.30㎞(4건) ◦ 누수발생 및 적수사고가 많은 관로 정비
	④ 불용관 정비 ◦ 불용관 정비목표 : 0.8㎞ ◦ 발견된 불용관은 분기점 폐쇄조치 우선
	⑤ 중블록별 유수율 관리 ◦ 대상 : 6개블록 ◦ 유량감시시스템(유량, 관압, 유속)을 활용한 중블록 관리강화	요 금 과 급수,시설관리과
	⑥ 가압급수 지역 효율적 관리 ◦ 관리대상 : 20개소 ◦ 과수압 해소추진, 적정수압유지, 누수탐지강화 및 하수관로점검	급수운영과 시설관리과
	⑦ 재개발 ․ 재건축 지역관리 ◦ 관리대상 : 4개소(착공예정) ◦ 계량기 폐전후 플러그 설치 및 분기점 폐쇄 적정관압 유지	요 금 과 급수,시설관리과
조정량 관리	⑧ 정확한 검침 및 심사 ◦ 조정목표 : 138,593천㎥(일평균 380천㎥) ◦ 전년 동월 대비 증감량 및 증감률 분석 관리	요 금 과
	⑨ 다량급수처 사용량 점검․분석 ◦ 점검대상 : 3,933개소 ◦ 월 300㎥ 이상 사용업소 중 증감률이 높은 업소 우선 점검	요 금 과
	⑩ 조례위반 단속 ◦ 추징목표 : 1,818㎥ ◦ 재개발․재건축지역 및 취약업소 특별관리	요 금 과
공급량 관리	⑪ 유량감시시스템을 통한 적정 공급량 관리 ◦ 공급목표 : 142,878㎥(일평균 391천㎥) ◦ 유량감시시스템 활용으로 일일유량 변동사항 점검 및 분석	요 금 과 급수,시설관리과
	⑫ 유량계관리 ◦ 관리대상 : 56개소 ◦ 유량계측 정확도 유지 (오차± 1.5%이내) 및 정기점검	시설관리과

Ⅲ 추진방향에 따른 세부 추진계획

1		급수시설 정비로 누수방지

1-1 상수도관 누수탐지 추진

2013년 누수탐지 현황

❍ 누수탐지 실적

- 배관연장 : 1,356km(서초구 606km, 강남구 750km)

- 탐지건수 : 252건(전체누수건수 590건의 42.7%)

- 구분별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	252	125	33	76	18	252	99	15	37	6	39	23	21	12	-

❍ 탐지실적 분석

- 탐지후 적출된 누수(252건)는 전체 누수(590건)의 42.7%로 예방효과 큼

- 탐지누수 적출은 대부분 50㎜이하 수요가 인입관임(62.7%)

- 수요가 인입관 중 비내식성관인 아연도관에서 주로 발생

2014년 누수탐지 세부 추진계획

❍ 탐지 목표 : 210건

❍ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

❍ 인원 및 장비 현황

구 분	누수탐지기			배관탐지기	탐지원	공무직	기간제 근로자
	다점형		음청식
	장 비	로 거
현황	6조	36개	16조	3조	3인	1인	5인

❍ 추진 계획

- 누수탐지 대상

․ 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 16개 지역, 12㎞(80～900㎜)

․ 지반취약 지하철역 주변 : 5개소 2㎞

․ 3회이상 누수 다발 취약관로 탐지 : 38개소(80～1,500㎜)

<다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적탐지>

․ 누수가 많이 발생한 블록 우선 탐지

․ 80㎜이상 누수 다발 취약관로 중점 실시

<음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지>

․ 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력관 등 탐지

․ 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역 : 3개 지역 2㎞

- 누수탐지 방법

․ 다점형 상관식 누수 탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

․ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

․ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

1-2 송배수관 정비

정비대상 : 3.3km

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	비 고
4건	D=400~900 L=3,300m	5,200	2014. 3 ～12
강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	D=400 L=850m	960	2014. 3 ～12
방배역~내방역간 배수관부설공사	D=500 L=750m	920	2014. 3 ～ 8
서초역~교대역간 배수관부설공사	D=400~500 L=700m	820	2014. 3 ～ 8
무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	D=900 L=1,000m	2,500	2014. 3 ～12

❍ 추진 방향

- 노후된 강관, 회주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고가 많은 관 정비

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환

- 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

․ 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

1-3 배급수관 정비

정비대상 : 4.34km

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	비 고
3건	D=80~300 L=1,780m	2,823	2014. 3～12
역삼동606-7번지외 2개소 세척갱생관정비공사	D=300 L=1,470m	1,147	2014. 3～ 7	단위 사업
서초동 1576-2외 2개소 세척갱생관정비공사	D=300 L=1,090m	976	2014. 3～ 7
급수공사(연간단가)	D=80~300 L=1,780m	700	2014. 3～12	연간 단가

❍ 목표 : 4.34㎞

- 세척갱생관 : 3.0km(사업비 2,295백만원)

- 흑PE관 : 1.34km(사업비 528백만원)

❍ 추진 방향

- 노후된 강관, 회주철관 중 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 하수도공사, ASP 덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

1-4 불용관 정비

정비목표 : 0.8㎞ (사업비 501백만원)

추진방향

❍ 불용관 철거 시 분기점 폐쇄 원칙 준수

❍ 각종 공사 시 발견되는 불용관 즉시 정비

추진방법

❍ 불용관 철거시 분기점을 폐쇄하여 누수요인을 근본적으로 제거

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장 입회

❍ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

❍ 재개발지역 내 미사용 인입관은 분기점 폐쇄 조치

- 본관 폐쇄시 자동적으로 정비가 가능한 불용관은 조합(시공사)과 협의

❍ 관 개량공사 예정구간(재개발구간 포함)의 불용관도 즉시 정비

- 시급하다고 판단되는 경우에는 내부방침을 받아 즉시 정비

❍ 즉시 폐쇄가 어려운 불용관은 별도 관리후 정비 가능한 시기에 조치

- 계획된 배관망 정비시 연계하여 불용관 정비

❍ 신규 공사시 기존 분기점 폐쇄여부를 확인하고 정비완료시까지 지속 관리

공사별 추진계획

구 분	공 사 명	목표(km)	비 고
	총 계	0.800
전체	긴급누수복구공사	0.20
강남구	역삼1동 외 14개동 급수공사	0.15
강남구	청담동 외 6개동 급수공사	0.15
서초구	내곡동 외 10개동 급수공사	0.15
서초구	잠원동 외 10개동 급수공사	0.15

2		지역(블록)단위 유수율 관리

2-1 중블록 유수율 관리

중블록 현황 : 6개 중블록

❍ 중블록별 유수율 및 관리부서

연번	중블록 명 칭	정수장별 (배수지)	2013년 유수율(%)	급수구역	관리부서
	계		96.56	강남구22개동, 서초구18개동
1	청 담	암사직송	94.07	강남구 13개동	급수운영과
2	서 초	암사(서초,양재)	97.27	강남구14개동, 서초구 2개동	급수운영과
3	암 사	암사(서초,양재)	99.28	강남구 3개동, 서초구 1개동	급수운영과
4	반 포	암사(반포)	98.05	강남구 4개동, 서초구12개동	시설관리과
5	방 배	암사(방배)	98.51	서초구 4개동	시설관리과
6	방배가 3	암사(방배)	95.26	서초구 5개동	시설관리과

중블록별 유수율관리 실적

❍ 2013년도 중블록은 모두 유수율이 94%이상 ~ 100%미만으로 양호

세부 추진계획

❍ 중블록별 담당자 지정 및 목표 설정 ․ 추진

- 중블록별 달성목표 설정 및 세부추진 계획 수립

- 유수율 하락 시 신속한 원인규명 및 해소 대책 강구

❍ 중블록별 유수율(공급량 및 조정량) 분석 ․ 관리 : 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리)을 활용한 공급량 ․ 조정량 증 ․ 감 원인분석

- 블록내 다량급수처 등 대형건물의 표준사용량 대비 적정사용여부 분석

❍ 유수율 편차 해소 추진

- 블록경계(현장)와 GIS, 요금정보 일치 및 변동 시 즉시 정리

- 중블록 경계지역 밸브조절 및 수계조절 시 반드시 기록 유지

2-2 가압급수지역 유수율 관리

가압장 현황 : 27개소

❍ 유인가압장 : 1개소(우면산)

❍ 무인가압장 : 5개소(방배, 삼성, 일원본, 내곡, 반포)

❍ 증압펌프장 : 21개소(서초 5개소, 강남 16개소)

추진상 문제점(2013년) 및 대책

❍ 문제점

- 가압지역의 경계와 요금관리시스템의 정보 불일치 및 실시간 유량감시 불가

❍ 대  책

- 가압지역의 경계와 요금관리시스템 정보 일치 : 변동 시 수시 정비

- 실시간 유량감시가 가능하도록 계측기 교체 : 기계식→초음파식, 전자식

세부 추진계획

❍ 유수율 90%미만, 100%이상 가압장 우선 관리(9개소)

가압장명	유수율(%)	비 고	가압장명	유수율(%)	비 고
국민단지	82	90%미만	쟁골	88	90%미만
내곡	73	“	궁마을	105	100%이상
논현1	81	”	방죽1	102	“
삼성	72	“	서초	108	“
세곡	82	“	-	-	-

❍ 가압장 최소유량값 변화 매일 감시 : 누수여부 확인

❍ 가압급수구역 경계밸브 개폐 상태 확인 및 경계지역 수압측정

❍ 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치

- 정점부 출수상태를 파악하여 적정한 관압(1.5 ~ 2.0㎏/㎠) 유지

❍ 요금관리시스템 활용 가압장별 수용가 전수조사

- 가압장별 도면 경계 확정 및 실사

❍ 기계식 유량계 → 전자식 및 초음파로 교체

2-3 재건축․재개발 지역 상수도 시설물 관리

재개발, 재건축 현황 : 4개 현장

연번	공동주택명	주 소	수전관리			건립 가구수	진행 사항	비 고
			계	폐전	미폐전
1	개나리4차아파트	역삼동712-2	96	96		276	관리처분 (이주전)
2	반포한양아파트	잠원동66외3	1		1	498		관리전환된 수전으로 주양수기만 관리
3	서초삼호1차아파트	서초동1310	1		1	885
4	우성3차아파트	서초동1332	280	15	265	421

세부 추진계획

❍ 이주시기에 맞추어 구간 및 골목단위별로 분기점 폐쇄

❍ 상수도 시설물 및 급수설비 관리상태 등 현장 확인

- 계량기 폐전, 철거 및 철거즉시 플러그 설치 → 부정급수 예방 등

❍ 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 점검

- 공동주택 재건축 → 주 계량기와 세대별 계량기 차인량 조정

- 미 이주가구 급수사용량에 맞게 제수밸브로 공급량 조절

- 가압지역 모터펌프 용량과 토출수압 조정 등으로 적정한 관리

❍ 장기 미정비 불용관 및 노후관 정비

- 사업 장기화 지역의 취약한 불용관 및 노후인입관에 대한 정비계획 수립 시행

3		조정량 제고

3-1 정확한 검침 및 심사

조정목표 : 141,774천㎥(일평균 388천㎥)

중점 추진사항

❍ 수도계량기 점검 및 심사 강화

- 검침일의 준수 및 착오검침, 검침소홀 등 검침의 적정여부

- 수도계량기 교체 및 검정 수전의 사용량 정산철저

- 신개전 수전 검침누락, 합산대상 수전 일부 사용량 조정누락 예방

- 탁상 ․ 허위검침 엄금 및 격증 ․ 격감 수전에 대한 원인분석

- 비정상인 전회 검침량으로 인정조정 사례 최소화

❍ 수도계량기 적기 교체

- 대상 : 고장계량기 및 만기 계량기(50㎜ 이하 소형 8년, 75㎜ 이상 6년)

- 교체 후 정산철저로 조정량이 누락되지 않도록 조치

- 교체지연 사유규명 및 신속조치로 장기 인정조정 해소

3-2 다량급수처 사용량 분석․점검

다량급수처 현황 (월300㎥이상 사용하는 급수처)

계	공공용		일반용		욕탕용
건수	건수	비율(%)	건수	비율(%)	건수	비율(%)
3,933	375	9.5	3,432	87.3	126	3.2

추진사항

❍ 추진절차

점검대상 선정	⇒	점검자 지정	⇒	현장 점검	⇒	점검결과 분석	⇒	조치 및 관리

❍ 점검대상 선정

- 1개 업소에서 단독으로 사용하는 급수처, 계량기 빈번 교체 업소, 조례 위반         개연성이 있는 업소 등을 우선 선정

❍ 점검자 지정 및 현장점검

- 직원별로 선정된 대상업소 지정 및 점검리스트에 의한 현장 점검

- 조례위반 사항 발견 시에는 즉시 증거확보(사진촬영 등)

❍ 점검결과 분석

- 당월과 전월 조정량을 비교, 증감량과 증감율 분석 관리

❍ 조치 및 관리

- 점검자는 검침지침, 사용량, 업소 특이사항 등 점검내용을  전산시스템에

정확히 입력하고 계량기 고장수전은 교체 및 요금정산 등 조치 요구

- 조치토록 요구한 사안에 대하여 추후 조치결과를 확인하여 관리

3-3 조례위반 단속

2013년 단속실적 : 175㎥, 4,439천원

2014년 추진일정 및 세부 추진계획

❍ 추진일정

추진기간	추 진 내 용	중 점 사 항
1～2월	대형공사장 급수실태점검	· 아파트 재건축단지 및 신·개축지 공사현장에 대한 급수실태 점검
3월	정수처분급수전 일제점검	· 상·하수도요금 체납으로 인하여 정수처분중인 수전을 무단개선하여 사용하는지 여부 점검
4월	호텔 및 백화점 급수실태 점검	· 호텔 및 백화점에서 부정급수 또는 혼용급수를 하는지 여부와 적정사용량 점검
5월	대중목욕탕 급수실태 점검	· 대중목욕탕이 속해 있는 복합건물로써 부정급수 또는 혼용급수를 하는지 여부 점검
6~7월	영업용 연2회이상 교체수전 점검	· 영업용 수전으로 연2회이상 계량기 빈번 교체 수전에 대하여 조례위반사항 여부 점검
8월	수영장 및 골프연습장 급수실태 점검	· 수영장 및 골프연습장에서 부정급수 또는 혼용급 수를 하는지 여부 점검
9월	급수탑 및 소화전 용도외 사용 여부 특별점검	· 하수도준설 등 공사현장에서 급수탑 및 소화전을 임의로 사용하는 행위 단속
10~12월	대형음식점 급수실태 점검	․ 대형음식점에서 부정급수 또는 혼용급수를 하는지 여부 점검

❍ 세부 추진계획

- 영업용 등 다량급수처(월평균 300㎥이상) 집중관리

․ 영업용, 대중목욕탕 수전에 대한 일제 점검계획

- 우수고객 방문서비스와 연계하여 사용량 분석 등 관리

- 취약업소 특별관리

․ 호텔, 사우나, 시장, 상가밀집지역 등 관리가 취약한 지역 관리

․ 사용량 분석 등을 통하여 의심이 가는 업소 조례위반 유무 정밀 조사

- 신 ․ 개축지 공사장 및 재개발․재건축 현장 중점관리

․ 구지자체 건축허가 관련부서 및 긴밀한 협조체제 유지

․ 건축물 신․개축 및 멸실사항을 신속히 파악하여 관리

․ 건축주 및 현장관리인 등에 대한 사전안내

․ 재개발․재건축 현장의 월1회 이상 순회점검

4		과학적인 공급량 관리

4-1 유량감시시스템을 통한 적정 공급량 관리

공급량 목표 : 146,165천㎥ (일평균 400천㎥)

중점 추진계획

❍ 적정 생산량 공급

- 수돗물 적정 생산량 유지를 위한 계절별, 시간대별 공급량 조절

- 유량감시 시스템 활용으로 일일유량 변동사항 점검 및 분석

- 관말 급수지역 출수상태 확인 등 정수장별 수계별 공급계통 점검

- 수요량 분석을 통한 적정 생산량 유지

❍ 공급량 분석실시

- 유량감시시스템과 연계, 공급량 증감원인 분석

4-2 유량계 관리

구역유량계(사업소간) 현황

구분	연번	명칭	구경 (mm)	설치위치	형식	수 계	관리	방향	설치 년도
유입	1	KN-1	2200	청담교하부탄천주차장 (송파구잠실동10번지)	초음파	암사	강남	암사→강남	2004
	2	KD-6	2200	농수산물 도매시장앞 (송파구가락1동479)	〃	암사	강동	강동→강남	2003
유출	1	KN-6	1500	사당역 한전변전소앞 (방배동 청두곶4길 31)	〃	우면산	강남	강남→남부	2004
	2	KN-2	600	사당역14번출구 (서초구방배동444-5)	〃	방배	강남	강남→남부	2004
	3	KN-3	400	사당역3번출구 (서초구방배2동2544)	〃	방배	강남	강남→남부	2004
	4	NN-4	700	신반포로 9(반포동) (반포주공 74동앞)	〃	암사	강남	강남→중부	2010

※ 중블록별 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	31	6	6	11	8
초음파, 전자식	31	6	6	11	8

세부 추진계획

❍ 구역유량계(사업소간) 점검

- 월간점검 : 월1회, 기전시설물 순찰시 자체 점검

- 특별점검 : 급격한 유량변동 등 필요시 자체 측정 후, 유지관리업체 합동점검

※ 비교측정 : 년2회(상, 하반기 1회) 본부와 합동시행

- 점검내용 : 전기설비 운전 이상유무, 초음파센서 취부 상태 이상유무,                       통신장비(PLC) 전송상태 점검 및 정상가동 상태점검 등

❍ 구역유량계(중블록간) 점검

- 월간점검 : 월1회, 기전시설물 순찰시 점검

- 특별점검 : 일일 공급량 관리를 통하여 유량 변동이 심할때 즉시 점검

Ⅳ 행정사항

사업소 대책회의 추진

과장회의

❍ 개최시기 : 매월 본부 유수율대책 회의 전

❍ 참석대상 : 소장 주재하에 요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장

❍ 회의안건

- 유수율 증․감 원인 분석

- 유수율 관련 추진 분야별 점검 및 평가

- 유수율 관련 추진상 문제점 도출 및 개선대책 마련

실무자회의

❍ 개최시기 : 매월 본부 유수율대책 회의 후

❍ 참석대상 : 요금과 유수율총괄, 급수운영과 및 시설관리과 유수율담당, 구역유량계담당

❍ 회의안건

- 본부회의 시 지시된 사항 검토

- 기타 당면 현안사항 등

추진실적 보고

❍ 유수율 향상 등 단위사업별 추진실적 보고(사업소 → 본부)

- 월간 추진실적 : 익월 5일까지 제출

❍ 한강둔치 내 유량계 공급량 보고(사업소 → 본부)

- 월간 공급량 : 익월 5일까지 제출

❍ 증감원인 분석 및 보고

- 공급량 : 전년동기대비 분석 등 해당 월 익월 13일 까지 제출

- 조정량 : 전년동기대비 분석 등 해당 월 익월 20일 까지 제출

	본부 유수율향상대책회의 일정
❍ 유수율 대책 회의 - 참석 : 소장, 과장(요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장) - 해당사항 : 유수율 목표 미달 및 전년동기 대비 하락 시 ❍ 유수율 실무 회의 - 참석 : 과장(요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장) - 해당사항 : 유수율 목표 미달 시

끝.