투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	2013년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설게변경 시행에 따른 변경계약 의뢰

1. 기전과-1859(2014.02.25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 2013년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2013.9.11.~2014.2.28.

다. 도 급 자 : 유유전기 대표 임선심

라. 설계변경금액

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감 액	비 고
공급가액	76,164,692원	60,010,000원	감)16,154,692원
부가가치세	7,616,469원	6,001,000원	감)1,615,469원
도 급 비	83,781,161원	66,011,000원	감)17,770,161원	물량정산(감액)

마. 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통개선, 시설비

붙임  1. 설계변경 시행 공문 1부.

2. 설계변경보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 설계변경도면 1부.

5. 제비율검증확인서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 02/25 장경옥
협조자	주무관	구희천
시행	기전과-1902	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개