투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	2013년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 시행에 따른 변경계약 의뢰

1. 기전과-1856(2014.02.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 2013년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사기간 : 2013.9.7.~2014.2.28.

다. 도 급 자 : 광명신호(주) 대표 김길남

라. 설계변경금액

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감 액	비 고
공급가액	73,264,641원	69,500,000원	감)3,764,641원
부가가치세	7,326,464원	6,950,000원	감)376,464원
도 급 비	80,591,105원	76,450,000원	감)4,141,105원	물량정산(감액)

마. 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

붙임  1. 설계변경 시행 공문 1부.

2. 설계변경보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 설계변경도면 1부.

5. 제비율검증확인서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 02/25 장경옥
협조자	주무관	구희천
시행	기전과-1900	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개