문서번호	친환경교통과-2925
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		그린카보급팀장	친환경교통과장
김현수		김정웅	02/25 강희은
협조

준공기한 연장에 따른 계약변경 검토보고

(2013년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리용역)

2014. 2

기후환경본부

(친환경교통과)

준공기한 연장에 따른 계약변경 검토보고

(’13년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리용역)

’14년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리용역 계약체결이 늦어질 것으로 예상되어 안전한 전기버스 운영을 위하여 ’13년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리용역 수행기간을 아래와 같이 연장하고자 함

Ⅰ				사 업 개 요		‘

계  약  명 : ’13년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리 용역

계약상대자 : 에스이엠서비스(주)

계약금액 : 107,390,000원

계 약 기 간 : 2013.3.1. ~ 2014.2.28

Ⅱ				계약변경내용		‘

계약변경사유

- ’14년 남산순환 전기버스 충전기 운영관리용역 계약체결 지연

- 안전한 남산순환 전기버스 운영

계약변경내용

계약금액	변경전	금107,390,000원(금일억칠백삽십구만원)
	변경후	금118,953,060원(금일억일천팔백구십오만삼천육십원)
	증 액	금11,563,060원(금일천일백오십육만삼천육십원)
계약기간	변경전	2013년 3월 1일 ~ 2014년 2월 28일
	변경후	2013년 3월 1일 ~ 2014년 4월 15일

소요예산 : 금11,563,060원(금일천일백오십육만삼천육십원)

- 예산과목 : 친환경교통과, 친환경교통차량 보급 및 오염물질 저감,
친환경차량 보급 및 기반구축, 친환경차량 보급,
그린카 충전인프라 구축(공공운영비 201-02)<2014년 예산>

붙임 : 1. 계약변경내역서 1부
2. 합의각서 1부.  끝.