투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	전면책임감리용역 설계변경(강남순환도로4공구, 전체10회)

1. 우리본부에서 시행하는 「강남순환도로4공구 전면책임감리용역」에 대하여   설계변경(10차)을 시행하고 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 강남순환도시고속도로4공구 건설공사 전면책임감리 용역(10차)

나. 공사규모 : 도로개설 폭4~ 8차로 연장 2.48km

다. 용역사 : ㈜서영엔지니어링 대표 이언기

라. 예산과목 : 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 감리비.

마, 설계변경 내역(전체 10회)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
용역기간	2002.12.30.~ 2014.6.19	2002.12.30.~ 2016.6.19	2년연장 (24개월)
감 리 비	7,450,320,000	7,450,320,000	변동없음	내역변경 (투입기간)

바. 변경사유 : 강남순환도로 건설공사 공기연기(2년)에 따라 감리용역  기간연장(2년) 및 계약금액 범위내에서 감리원을 조정하여 배치

붙임 : 1. 책임감리용역 설계변경 보고서 1부.

2. 책임감리용역 변경 설계서 1부.

3. 공기연장 보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	시희식		도시고속도로과장	성선주		토목부장	02/25 노우성
협조자
시행	토목부-3663	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청서소문 2별관 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개