문서번호	시설보수과-1475
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
이종욱	김지환	구현모	02/25 김만수
협 조

- 설계변경(정산)보고서 -

도로시설물 일상유지보수공사

2014.  2.

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

- 설계변경(정산)보고서 -

도로시설물 일상유지보수공사

『2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종교량 및 고가 2종법정외)』와 관련 서울특별시시설관리공단 설계변경(3회)제출에 대하여 아래와 같이 검토하고 변경계약 하고자 함.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종교량 및 고가 2종법정외)

❍ 공사기간 : 2013. 4. 8 ~ 2014. 2. 28.

❍ 공사개요 : 단면복구 2,858㎡, 교면포장 202a, 신축이음 186m

용접보수, 볼트 및 강재 재도장

❍ 총공사비 : 2,410,830천원(도급비 2,150,830천원, 관급비 217,900천원,

이설비 42,100천원)

❍ 도 급 자 : 은서보강기술(주) 대표 이승우

❍ 설계변경내역(3차)

구 분	당 초	변 경	증․감액
총 공 사 비	2,410,830,000	2,409,790,000	감 1,040,000
도 급 비	2,150,830,000	2,223,540,000	증 72,710,000
관 급 비	217,900,000	166,060,000	감 51,840,000
이 전 비	42,100,000	20,190,000	감 21,910,000

□ 주요 설계변경 내용

❍ 상판보수	:     52㎡	→  87.7㎡(증35.7㎡)

❍ 도막식방수(야간)	:  5,264㎡	→  5,937㎡(증673㎡)

❍ 표면보수	:    280㎡	→  948.2㎡(증668.2㎡)

※ 세부내역 붙임 참조

□ 변경사유

❍ 서울역고가 안전관리

- 시설보수과-993호(2014.2.4)와 관련 서울역고가시설물 안전관리를 위하여 긴급보수

❍ 작업지시에 따른 물량증감, 신규공종 발생

- 시설물현장관리제(정기점검, 정밀점검, 특별점검, 도시품격향상 등) 지적사항 및 민원사항에 대한 긴급보수 등으로 물량 증․감, 신규공종 발생

❍ 보험료 사후정산

- 건강보험료, 노인건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금비 실 지급 금액으로 정산

□ 보고자 의견

❍ 상기 보고내용과 같이 서울시시설관리공단 설계변경서 제출에 대하여 승인하고 변경계약 하고자 함.

붙  임 : 서울시 시설관리공단 공문 1부.  끝.