투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	도로시설물 일상유지보수공사 설계변경(정산)시행

1.  2013년 사업으로 시행중인 『2013년 도로시설물 일상유지 보수공사(1종교량 및 고가, 2종 법정외)』에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종교량 및 고가, 2종 법정외)

나. 공사기간 : 2013. 4. 8 ~ 2014. 2. 28.

다. 도 급 자 : 은서보강기술(주) 대표 이승우

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	2,410,830,000	2,409,790,000	감)	1,040,000
도 급 비	2,150,830,000	2,223,540,000	증)	72,710,000
관 급 비	217,900,000	166,060,000	감)	51,840,000
이 전 비	42,100,000	20,190,000	감)	21,910,000

마. 사업별 예산과목

사 업 명	세부 예산과목	예산현황
도로시설물일상유지보수공사	도시안전실 도로시설과, 교량관리, 도로시설물 안전관리 및 수준향상, 교량시설물운영, 도로시설물(교량관리)일상유지보수, 시설비(205-401-01)	\1,787,414천원
홍제천 5복개 보수공사	도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 안전관리 및 수준향상, 하천복개구조물 관리, 홍제천 5복개 보수공사, 시설비(205-401-01)	\624,140천원

바. 설계변경 사유

- 연간단가계약으로 시행하는 공사로 수시로 발생하는 시설물파손,  예측하지 못한 긴급보수 등으로 물량 증․감, 신규공종 발생.

- 시설보수과-993호(2014.2.10)와 관련 서울역고가 시설물 안전관리를 위하여 긴급보수

- 건강보험료, 노인건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금비 실 지급 금액으로 정산

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 서울시시설관리공단 제출공문 1부.

4.	서울역고가 시설물 안전관리 방침서 1부.

5. 제비율검증 1부.	끝.

주무관							이종욱				주무관					김지환					시설보수과장					구현모					서부도로사업소장						02/26 김만수
협조자				주무관							이경남					관리단속과장							代계기남
시행			시설보수과-1508										(						)		접수												(						)
우	121-270					서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		300-8374							/전송			300-8384					/														/	대시민공개