투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(제3회-정산)시행[도로시설물 일상유지보수(1종터널 및 복개)]

1. 우리 사업소에서 시행중인 『2013년 도로시설물 일상유지 보수공사(1종터널 및 복개)』에 대한 설계변경(제3회-정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종 터널 및 복개)

나. 공사기간 : 2013. 4. 23 ~ 2014. 2. 28.

다. 도 급 자 : ㈜신우시스템 대표 유선경

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감액
총 공 사 비	1,898,298,920	1,888,728,920	감)9,570,000
도 급 비	1,681,570,000	1,672,000,000	감)9,570,000
관 급 비	186,728,920	186,728,920	-
이 전 비	30,000,000	30,000,000	-

마. 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(일상유지보수공)

- 도로시설관리, 하천복개구조물 관리, 녹번천복개외 1개소 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(녹번천복개외 1개소 보수공)

바. 설계변경 사유

- 연간단가 계약으로 시행하는 일상유지보수공사로 시설물현장관리제(정기점검, 진단·점검, 특별점검) 지적사항 및 긴급보수 등으로 물량 증·감 발생

붙임 : 1. 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 제비율검증 완료 확인표 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					김지환					시설보수과장					구현모					서부도로사업소장						02/26 김만수
협조자				주무관							이경남					계약1팀장							김점선
시행			시설보수과-1495										(						)		접수												(						)
우	121-270					서울 마포구 상암동 1732																/
전화		02-300-8375							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	대시민공개