서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

경영정보시스템   연동시험계획서

2014. 11. 03

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 11. 03
	시험계획서	개정번호	1.00

목   차

1. 공사개요	2

2. 시공구성도	3

2.1 광 모듈 설치	3

2.2 광 점퍼코드 설치	3

3. 시험일정	4

4. 출입자 명단	5

5. 안전관리 및 환경관리 계획......................................................................................................................................6

공사 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2단계) 통신설비 구축
2. 공정명	MIS 광모듈 설치, 광점퍼코드 포설 및 성단
3. 공사위치	918, 926 정거장 통신기계실
4. 공사목적	서울특별시도시기반시설본부에서 건설하는 도시철도9호선 2단계 구간의 MIS 개통을 위한 작업
5. 규 모	1. 광점퍼코드 포설 SC/SC – SC/PC 타입 2M 2개 (918정거장) 2. 광 모듈 설치 10G ER XENPACK 광 모듈 2개 (918 -> 926) 10G LR XENPACK 광 모듈 4개 (918, 926 정거장)
6. 주요공종	상위링 하선 918 -> 926 방향으로 광점퍼 패치 종단간 광 선로시험 (선행) 광 모듈 제거(ER) 후 삽입(LR) 광점퍼코드와 광 모듈 연결 기존 포트에 구성되있던 IP 신규 변경(기존 IP 926정거장 설정) 연동역간 통신 시험 (Ping Test : 918 <-> 926, 926 <-> CC) 상위링 라우팅 점검 및 FailOver Test
7. 공사기간	2014. 11. 18 AM 02 : 00 ~ 2014. 11. 18 AM 04 : 30	일정협의가능
8. 주요자재목록	광점퍼코드(SC/PC-SC/PC) 2M 2개 광 모듈(10G LR XENPACK) 2개 광 모듈(10G ER XENPACK) 2개	ER 광 모듈은 918 -> 926 이동설치

2. 시공 구성도

2.1 광 모듈 설치

- 918역사에 광모듈을 교체하여 삽입하고 교체된 광모듈을 926에 설치

2.2 광 점퍼코드 설치

(1) 918 정거장 OFD 구성도

※ 필요 선행작업 - 1단계 925역사와 2단계 926역사간 패치작업은 기좀 1단계 운영사와 협의하여 2단계 MIS 연계작업전에 작업예정.

3. 시험일정

3.1 시험계획 전체 일정표

구간	항목	작업일	비고
1단계	광점퍼작업	11.18 야간	925역사, 918역사 통신기계실
	광모듈교체	11.18 야간	918 통신기계실(2단계 광모듈과 교체)
2단계	광모듈연결	11.18 야간	926 통신기계실(교체된 광모듈 삽입)

※ 주1) 상기 일정은 작업 승인 일정에 따라 다소 변경될 수 있음

※ 주2) 1단계 운영사 엔지니어 협의에 따라 지원장소 위치 변경 가능(918 -> CC)

4. 출입자 명단

□ 공사명 : 서울지하철9호선 연장건설 통신설비 구축

번호	이름	주민번호	주소	소속	핸드폰	비고
1	음두성	750109 – 1******	경기도 고양시 일산서구 탄현동 임광A 107-204	현대정보기술	*************
2	김석훈	830802 – 1******	경기도 의정부시 신곡동 대우아파트 104-706	(주)에이치에스아이 테크	*************
3	서현석	–		(주)에이치에스아이 테크	*************
4	최윤호	–		(주)링네트	*************	1단계지원

5. 안전관리 및 환경관리 계획

5.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

2단계 MIS 작업원으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민,형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

5.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험용인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체이상유무, 음주여부)

5.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업후 작업 폐기물을 수거후 분리 배출

5-4 사고보고 계통도