경의선 문산~임진강 전동열차 운행개시 계획

2020. 3.

한 국 철 도 공 사

(광역철도본부)

1		개통 개요

□ 사업 개요

◦ (사업내용) 문산~임진강역 간 6.0㎞ 단선 전철화 및 임진강역 개량

* 전동열차 운행을 위해 임진강 역사 증축(AFC 설비 등) 및 고상홈 추가 등 시설 개량

◦ (사업기간) ’16년～’20년 3월       * 개통예정일 ’20. 3.28.(토)

◦ (사업효과) 경기북부 교통편의 증진 및 관광수요를 통한 지역균형발전 도모

	< 주요 추진경과 >
․ 제3차 국가철도망구축계획(’15년～’25년) 반영(국토부, ’16.6월) ․ 문산～도라산 전철화사업 추진계획 수립(公團, ’16.7월) ․ 실시설계 준공(기술조사 포함, ’17.7월) 및 착공(’19.5월) ․ 분야별 합동점검(’19.10월), 사전점검(’19.12월) 및 이용자점검(’20.2월) 시행

□ 추진 현황 및 계획

노반, 전철전력, 궤도, 건축, 신호, 통신 등 분야별 건설공정 추진

중간점검 (공정률 50% 도달시)	▶	합동점검 (D-6월)	▶	사전점검 (D-120일)	▶	종합시험운행 (시설물검증+영업시운전)	▶	개통
’19. 8.		’19. 10.		’19. 12.		시설물검증 : ’20. 2.19.		’20.3.28
						영업시운전 : ’20. 3. 5.∼11.(3일)

2		전동열차 운행계획

□ 열차 운행계획 (문산역↔임진강역 셔틀운행)

◦ (운행구간) 경의선 문산역 ~ 임진강역간

◦ (운행횟수) 평일 4회(상 2회, 하 2회), 토․일․공휴일 8회(상 4회, 하 4회)

◦ (운행시간) 오전 09시~11시, 오후 15시~18시 사이 운행

* 운임체계 : 現 수도권 광역전철 운임체계 적용

시간대	평일			토․일․공휴일
	임진강방면	문산방면	합계	임진강방면	문산방면	합계
오전(09시 ~ 11시)	1	1	2	2	2	4
오후(15시 ~ 18시)	1	1	2	2	2	4
합계	2	2	4	4	4	8

【문산~임진강역 전동열차 운행시간표】

구 분	평 일	토·일·공휴일
문산→임진강	[K2602] 10:15→10:22	[K2602] 09:40→09:47 [K2604] 10:40→10:47
	[K2604] 17:05→17:12	[K2606] 15:40→15:47 [K2608] 16:50→16:57
임진강→문산	[K2601] 10:40→10:47	[K2601] 10:10→10:17 [K2603] 11:00→11:07
	[K2603] 17:25→17:32	[K2605] 16:10→16:17 [K2607] 17:10→17:17

* 경의선 4량 편성 입·출고 투입 가능시간대 및 DMZ-train과의 경합여부 등을 고려하여 설정

※ 경의선(서울~문산) 열차운행 현황(4량) : 평일 58회, 휴일 36회

3		영업개시 계획

□ 영업 개시일(예정) : ’20. 3.28.(토), 09:40~(문산→임진강)