문서번호	푸른도시과-23183
보존기간	3년
결재일자	2020.10.20.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	공원기획팀장	푸른도시과장		힐링도시국장
협 조
	공원여가과장
	녹지관리팀장

경춘선 숲길 가을음악회 사업 변경 계획

힐링도시국

(푸른도시과)

「경춘선 숲길 가을음악회」사업 변경 계획

COVID-19로 인해 경춘선 숲길 가을음악회 개최가 어려워 시급한 현안사항 해결 및 효율적인 예산 집행을 위해 사업계획(예산전용) 변경 추진하고자 함

Ⅰ		사업개요

▢ 사 업 명 : 경춘선 숲길 가을음악회

▢ 사업기간 : 2020. 10.

▢ 사 업 비 : 100백만원(시비,행사운영비)

▢ 사업내용 : 오케스트라, 대중가요 등 음악회 개최

Ⅱ		변경계획

▢ 변경사유

○ COVID-19 확산 예방을 위해 대중이 운집하는 음악회 개최가 어려움

○ 영축산 순환산책로(2단계) 준공 예정에 따른 공원이용객 야간 안전사고 예방을 위해 보행등 설치 시급

▢ 세부 변경 계획

○ 추진방법 : 서울시 사업변경 승인(예산전용) 후 공사시행

- 사 업 명 : 경춘선 숲길 가을음악회 → 영축산 순환산책로 보행등 설치사업

- 예산과목 : 공원이용프로그램운영비(행사운영비) → 공원내 공원등 시설개선(시설비)

○ 변경 사업 개요

- 대 상 지 : 노원구 월계동 산106-6번지 일대(영축산근린공원)

※ 토지소유 : 시유지, 구유지

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 12.

- 규    모 : 데크로드 0.6km

- 사 업 비 : 100백만원(공사비)

- 내    용 : 경관조명 170개, 지주 1본, 분전반 1면, 누전차단기 등

〈 사업 대상지 및 설치 사례 〉

사업 대상지	보행등 설치 광경(1단계 구간)

Ⅲ		추진일정

▢ 2020. 10. 19.   : 사업변경(예산전용) 승인 요청(공원녹지정책과)

- 전용가능 여부 市 사전 협의 : 시공원 내 공원등 시설개선 가능(2020.10.12.)

▢ 2020. 10.        : 실시설계(자체), 설계심의 등 절차이행

▢ 2020. 11.        : 공사 착공

▢ 2020. 12.        : 공사 준공

Ⅳ		행정사항

▢ 사업변경(예산전용) 요청 공문 발송(공원여가과→공원녹지정책과).  끝.