계량기 미감지율 최소화[1% 이하]를 위한 기술개발

계량기관련 기술개발을 통해 계량기에 계측되지 않는 수돗물의 양을 최소화(1%이하)하여 상수도 경영 합리화에 기여

필요성

○ 서울시 수도계량기의 미감지율은 2.3%로 국내 특․광역시 보다는 낮으나, 아직도

선진국에 비해 높은 편임

○ 계량기의 유량측정 범위를 벗어난 유량에 의한 미감지 수량 최소화 성능개선 필요

최종(도달) 목표

○ 계량기 미감지율 개선에 따른 조정량 증대로 세입증대

추진기간 : ’14. 1 ~ ’16. 12(3년, 중기)

○ 2014. 01 ~ 12      : 대형 수도계량기 적정구경 선정 기준 마련

○ 2015. 01 ~ 12      : 소형 수도계량기 적정구경 선정 기준 마련

○ 2015. 01 ~ 2016. 12 : 수도계량기 고장율 저감을 위한 기술 개발

추진방법 : 자체추진 , 자체 용역시행

○ 주관부서 : 상수도사업본부(계측관리과)

○ 추진부서 : 상수연구원(배급수과)

○ 협조부서 : 각 수도사업소(요금과)

주요내용

○ 대형 수도계량기 적정구경 선정기준 수립

- 고장율 및 미감지율 저감을 위한 구경별, 급수방식별(직결, 저수조, 혼합) 구경         선정 기준 수립

- 적정 구경 설치를 위한 현장 물 사용 패턴조사 매뉴얼 작성

○ 소형 수도계량기 적정구경 선정기준 수립

- 소형 수전 물 사용 패턴조사 실시(외부기관 용역)

- 미감지율 저감을 위한 구경별, 급수방식별(직결, 저수조) 구경선정 기준 수립

○ 만기 및 사용 중 철거 계량기 유량시험

- 누적 사용량 증가 및 사용기간 경과에 따른 미감지율 발생요인 분석

○ 수도계량기 고장율 저감을 위한 기술개발

- 전자기식, 초음파식 검침량 변화 및 고장원인 분석

- 디지털, 전자기식, 초음파식 수도계량기 성능개선방안 도출

○ 미감지 수량을 최소화 하기 위한 기술기준 제시

- 전이유량/최소유량=1.6 적용에 따른 오차범위 개선(현행은 4.0 적용)

- 미감지율 개선을 위한 업무 매뉴얼 작성

추진일정 및 예산

○ 소요예산(계) : 100,000천원

○ 공정표(추진일정)

수행내용	추진일정(공정률)
	2014년				2015년				2016년
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	1분기	3분기	4분기
국내외 자료조사
대형 수도계량기 적정구경 선정기준 수립
소형 수전 물 사용 패턴조사
소형 수도계량기 적정구경 선정기준 수립
만기 및 철거계량기 유량시험
수도계량기 고장율 저감을 위한 기술개발
미감지 수량 최소화를 위한 기술기준 제시
자문회의
최종 성과 보고
소요예산(천원)	-				100,000천원				-