계약금액조정 검토결과서

건 명	2017년 광진구 관내 상수도공사		요청기관 (부서)	동부부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2018. 5. 4.		공사개요	D = 15 ~ 300mm L = 1,882m
공사기간	2017.6.29. ~ 2018.6.30.		도 급 자	(주)광성이엔지 대표 이기춘
심사요청(천원)			심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
657,502	721,072	증)63,571	63,571	62,966	감) 605
구 분	검 토 결 과					비 고
변경사유	○ 계약금액 조정 검토보고(급수운영과-10876, 2018.5.4.) - 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증감 및 신규공종 발생 - 신축건물 증가에 따른 벽체계량기 설치 시공물량 변경 - 건강, 연금, 노인장기 용양보험료 정산에 따른 변경 등
검토내용	○ 신규공종 : 2018년 건설공사 표준품셈, 2018년 상반기 노임단가 적용 ○ 신규자재(부단수할정자관) : 80/80 추가 및 100/80 자재단가 조정 ○ 수량 조정 - CONC-인력비빔타설(t=15㎝) : 당초 0.59a → 조정 0.64a - 소형공사안내판 설치 철거 : 당초 541개소 → 조정 270개소 - 부단수 할정자관(사급자재) • 80/80mm : 당초 0개 → 조정 1개 • 200/100mm : 당초 1개 → 조정 0개 • 200/150mm : 당초 1개 → 조정 2개					조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 건설하도급발급수수료, 건설기계대여대금, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람