계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 강서수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사			요청기관(부서)		강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 4. 16.		공사개요	- 아스콘 410a - 소형보도블록 10a
공사기간	2020. 4. 10. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		두악(주) 대표 이후영
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
1,452,609	2,438,850	증)986,241		증)986,241	증)864,251		감)121,990
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경(2회) 검토보고(급수운영과-7115, 2021.4.16.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 신규공종(아스팔트 스템프포장) 발생
검토내용	○ 수량조정 - 파쇄물 걷기 및 싣기 수량 삭제 ⇒ 소파보수표층공, 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 공종에 상차 포함 - 보조기층재 및 혼합기층재 소운반 조정 ⇒ 10㎥이상은 현장도착 단가로 소운반비 제외 - 고압블록걷기 수량 삭제 ⇒ 터파기 수량에 포함 ○ 단가조정 - 아스콘 및 재생아스콘 운반(관로공사구간) : 4.5DT → 15DT							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람