계약금액조정 검토결과서

건 명	2018년 목1동외 17개동 상수도공사 (장기계속계약)			요청기관(부서)		강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2019. 6. 25.		공사개요	- D=15~300㎜, L=1,584m
공사기간	2018. 6. 12. ~ 2019. 6. 30.			도 급 자		(주)비성건설 대표 임윤정
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
664,942	696,630	31,688		31,688	26,683		감)5,005
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 검토 보고(급수운영과-14255, 2019.6.25.) - 최근 3년 평균 수량으로 산출되어 시공 중 증감 사항 발생 - 보험료 및 퇴직공제부금비 등 실비정산
검토내용	○ 조정 내역 - 고압블록포장걷기와 고압블록포장공 수량 일치 : 2.57a → 1.26a - 주철(이형관)부설공, 주철관철거공, 제수밸브 부설 및 접합공 80㎜~150㎜ : 인력 → 기계 - 모래(환토재)시내도착도 : 1,000㎥ → 991㎥							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 잔토처리량(수도권매립지)은 반드시 반입량 확인 후 정산 할 것. ○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람.
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.