계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 강서수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사			요청기관(부서)		강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 6. 15.		공사개요	- 아스팔트콘크리트포장 493a - 소형보도블록포장 11a
공사기간	2020. 4. 10. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		두악(주) 대표 이후영
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
2,751,960	3,836,713	증)1,084,753		증)1,084,753	증)1,084,753		-
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경(최종) 검토보고(급수운영과-11289, 2021.6.15.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실정산
검토내용	○ 적정							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람