계약금액조정 검토결과서

건 명	2020-2년 중구 관내 상수도공사			요청기관(부서)		중부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 6. 1.		공사개요	- D=20~300㎜, L=867m
공사기간	2020. 11. 27. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		(주)광장이엠씨 대표 황갑주
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
567,445	620,620	증)53,174		증)53,174	증)50,974		감)2,200
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 검토 보고(급수운영과-10736, 2021.6.8.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실비 정산
검토내용	○ 수량조정 - 환토 소운반 및 상차(집하장) : 438㎥ → 371㎥ ※ 10㎥이상은 현장도착도 단가로 소운반 불필요 - 환토상차(집하장) 야간 : 99㎥ → 538㎥ - 교통정리원(야간) : 14인 → 0인 - 안전원(야간) : 31인 → 45인							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람