계약금액조정 검토결과서

건 명	2017년 은평구관내 상수도공사 (장기계속단가계약)			요청기관(부서)		서부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2018. 6. 19.		공사개요	- 구경 13~300㎜, 연장 2,442m
공사기간	2017. 6. 29. ~ 2018. 6. 30.			도 급 자		㈜적성건설 대표 최석원
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
1,156,978	1,208,619	증)51,641		51,641	46,576		감)5,065
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 및 계약금액 조정 본부심사의뢰(시설관리과-13132, 2018.6.21.) - 신규공종 및 시공 물량 증감 사항 발생 - 보험료 등 실비 정산
검토내용	○ 수량 조정 - 작업차량비 급수공사 : 1,022개소 → 926개소 - 부단수할정자관 400/100㎜ : 1개 → 0개							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람