계약금액조정 검토결과서

건 명	2017년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사		요청기관 (부서)	강동수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2018. 4. 20.		공사개요	아스팔트 포장 : 205.06a 보도블록 : 5.06a
공사기간	2017.3.2. ~ 2018.4.30.		도 급 자	두광건설(주) 대표 권재섭
심사요청(천원)			심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
2,109,716	2,319,361	증) 209,645	209,645	208,227	감) 1,418
구 분	검 토 결 과					비 고
변경사유	○ 설계변경(4회,최종) 및 계약금액 조정(급수운영과-6295, 2018.4.23.) - 아스팔트 포장공사 물량 증가 - 동절기 신축건물 급수공사 및 노후배급수관 정비물량 증가에 따른 포장물량 증가
검토내용	○ 아스팔트 포장깨기(0.18㎥) 수량 조정 : 당초 85㎥ → 조정 77㎥ ○ A-파쇄물운반(0.18)(4.5DT,현장→집하장) 수량 조정 : 당초 303㎥ → 조정 295㎥ ○ 파쇄물기계상차(0.7㎥) 수량 조정 : 당초 319㎥ → 조정 311㎥ ○ 아스팔트 표층공(t=5cm,10㎡이상) 수량 조정 : 당초 37.5a → 조정 36.33a ○ 아스콘 운반(#78) 10㎡이상[4.5DT(공장→현장,임적20.9km)] 수량 조정 : 당초 657 TON → 조정 643 TON					조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 건설하도급발급수수료, 건설기계대여대금, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람