계약금액조정 검토결과서

건 명	여래사 외 2개소 간선배관 부설공사			요청기관(부서)		중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2019. 9. 27.		공사개요	- D=15~300㎜, L=1,226m
공사기간	2019. 4. 8. ~ 2019. 11. 2.			도 급 자		상신건설(주) 대표 원상연
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
225,071	266,750	증)41,679		41,679	36,036		감)5,643
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 계획(시설관리과-25299, 2019.10.4.) - 현장실정보고 및 추가 작업지시에 의한 물량변경 ․ 스폴파이프 → STS직관 변경 등 5건
검토내용	○ 조정 내역 - 환토소운반, 환토상차 수량 삭제(10㎥ 이상 현장도착도) - 가설급수장치 본관 설치 및 철거 : 2개소 → 1개소 - 소형공사안내간판 설치 및 철거 수량 삭제(안전시설에 포함)							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람.
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.